문서번호	도시재생과-4978
결재일자	2018.10.26.
공개여부	비공개
방침번호

주무관		도시재생2팀장		도시재생과장	지속가능도시추진단장
임선오		조남문		이정희	10/26 라병오
협조
	지방행정주사		김준석

★ ◉

-성수동 도시재생 활성화사업-

2018년도 세출예산 명시이월 계획

성   동   구

(도시재생과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [√] 계속사업 [√] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [√] 환경영향 [ ] 안전 [ ] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [ ]
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

- 성수동 도시재생 활성화사업 -

2018년도 세출예산 명시이월 계획

성수동 도시재생 활성화사업 시행에 따른 사업비가 당해연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것으로 예측되는 세출예산(시비9 : 구비1)에 대하여 명시이월하여 예산의 신축적 운용과 사업의 계속성을 확보하기 위함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 지방재정법 제50조(세출예산의 이월) 제1항

□ 서울특별시 성동구 재무회계규칙 제27조(이월예산의 집행)

Ⅱ		사 업 개 요

□ 사 업 명: 성수동 도시재생 활성화사업

□ 위치․면적: 성수동1가 1․2동, 성수동2가 1․3동(886,560㎡)

□ 성수 도시재생사업 현황

구 분	사 업 내 용	사 업 비 (총105억원)	비 고
계획수립	-도시재생활성화계획수립용역	5억	- 완료(’16.12.)
일터재생	-산업혁신공간조성(①) -교각하부경관개선(②)	16억	- 인근지역 민원으로 사업계획 조정 중, ‘19.상반기 준공목표
삶터재생	-우리동네 안심길(③) -생활자전거순환길조성(④)	11억	- 완료(’18.07.)
쉼터재생	-지역문화특화가로조성(⑤)	11억
공 동 체 재 생	-상생도시센터(앵커시설)	17억	- 준공(’17.06.)
	-나눔공유센터(⑥)	34억	- 설계용역 추진 중, ‘19.12월 준공예정
	-주민공모 -주민역량강화 아카데미	11억	- 년중 계속 추진

□ 예산교부 현황 (2015 ~ 2018년)                             (백만 원)

구 분	통계목	소 계	2015년	2016년	2017년	2018년
계		10,500	1,500	4,612	2,657	1,731
1	연구용역비	500	500
2	사무관리비	390		98	154	138
3	공공운영비	18			5	13
4	행사운영비	99		39	10	50
5	시책업무추진비	6		2	2	2
6	행사실비보상금	23			8	15
7	민간경상사업보조	530		350	100	80
8	시 설 비	8,851	1,000	4,120	2,348	1,383
9	자산취득비	83		3	30	50

※ 추가사항: 서울시 특별교부금 2018.10월 교부 1,300백만원(시설비, 나눔공유센터 건립)

Ⅲ		명시이월 내역

□ 2018년도 세출예산 명시이월 내역

정책 사업	단위 사업	세부사업	편성목	명시이월 내용	예산액(원)	이월액(원)
계					2,732,620,000	1,432,620,000
도시 재생	도시 재생	성수동 도시재생 시범사업(보조)	시설비	성수도시재생 마중물사업(나눔공유센터 등) 조성 사업비	2,682,620,000	1,382,620,000
도시 재생	도시 재생	성수동 도시재생 시범사업(보조)	자산 및 물품 취득비	성수도시재생 마중물사업(나눔공유센터 등) 소요 물품 구입비	50,000,000	50,000,000

□ 명시이월 사유

❍ 성수 도시재생 마중물 사업인 나눔공유센터 설계용역 진행 중으로 동절기 공사 등 공사시기를 감안할 때 금년도에는 집행이 어려울 것으로 예상되므로 명시이월하여 예산의 신축적 운용과 사업의 계속성을 확보하고자 함

- 마중물 사업(나눔공유센터 건립이후) 조성세부계획에 따른 공간 조성 및 물품구입비

Ⅳ		행 정 사 항

□ 2018년도 세출예산 명시이월: 기획예산과

첨 부   명시이월사업조서 1부.  끝.