성북의 미래, 현장에서 답을 찾다
		성북구
수신자		내부결재
(경유)
제목	2018년 북한산공원 보수정비사업 설계변경

우리구에서 추진하고 있는『2018년 북한산공원 보수정비사업』에 대하여 아래와 같이 설계변경하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2018년 북한산공원 보수정비사업

2. 공사내용 : 자연학습장 조성 및 수목식재 등

3. 공사기간 : 2018. 07. 16. ∼ 10. 31.

4. 도급금액 : 금161,189,580원

5. 도급업체 : 한국도시녹화, 대표 김철민

6. 변경사유 : 보고서별첨

7. 도급비 증감내역                                                           (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비고(증감)
도 급 비	161,189,580	177,001,000	증 15,811,420

8. 예산과목 : 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원유지관리 및 이용활성화,시공원 유지관리 및 보수정비, 시설비 및 부대비, 시설비(시비-도시개발특별회계)

붙 임 : 1. 설계변경사유서 1부.

2. 설계변경보고서 1부.

3. 설계변경내역 1부.  끝.

주무관	박일영		공원기획담당	김병완		공원녹지과장	이상용		도시환경국장	10/26 이계섭
협조자	계약담당	이계웅		재무과장	김영임
시행	공원녹지과-18323	(		)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 168 (삼선동5가)	/	http://www.seongbuk.go.kr
전화	02-2241-3663	/전송	2241-6565	/	park1105@sb.go.kr	/	대시민공개