＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(신논현역~삼성역간외 1개소 송배수관 정비공사)

우리사업소에서 시행중인 「신논현역~삼성역간외 1개소 송배수관 정비공사」에 대하여  준공기한을 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명: 신논현역~삼성역간외 1개소 송배수관 정비공사

나. 계약금액: 금773,087,230원(변경없음)

다. 계약기간

1) 당초: 2018.5.2. ~ 2018.10.28.

2) 변경: 2018.5.2. ~ 2018.12.28.

라. 연기사유: 관할경찰서 공사중지 및 지하철이설구간 연결방법 변경 검토에 따른 공사 지연

마. 지체상금 부과여부: 미부과

바. 선금지급 여부: 220,000,000원(지급일: 2018. 6.18.)

붙임  1.준공기한 연기결정 품의서 및 관련서류

2.합의서 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	김병주		급수운영과장	10/26 박희철
협조자
시행	급수운영과-16486	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	02-3146-4853	/전송	02-3146-4889	/	qudwn8065@seoul.go.kr	/	부분공개(6)