내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기요청(북악스카이웨이1교 개축공사 건설폐기물처리용역)

1. 교량안전과-18602호(2018.10.25.)와 관련입니다.

2. 우리시에서 추진 중인 『북악스카이웨이1교 개축공사 건설폐기물처리용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 북악스카이웨이1교 개축공사 건설폐기물처리용역

나. 용역기간 : 2017.04.03. ~ 2018.10.31

다. 도 급 자 : (주)도성개발 대표 박진영외 1개사

라. 도 급 비 : 금86,840,000원

마. 준공기한 연기 내용

- 당초 : 2017.04.03. ~ 2018.10.31

- 변경 : 2017.04.03. ~ 2018.12.21. (+51일)

바. 귀책사유 : 발주처

사. 연기사유

- 교각 기초(경암) 굴착공법 변경, 민원(소음)에 따른 작업시간 단축, 여름철 폭염 관련 공사장 실외근로자 안전조치 등으로 인한 공사기간 연장에 따른 용역 준공기한 연기

아. 예산과목

- 교량관리, 일반교량관리, 북악스카이웨이1교 개축공사, 시설비 및 부대비, 시설비 (‘17 사고이월 예산)

붙임 1. 준공기한 연기 검토 보고 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	교량안전과장
★주무관	정성민		강북일반교량팀장	손창익		교량안전과장	10/26 김종호
협조자
시행	교량안전과-18697	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동) 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1969	/전송	02-2133-1429	/	phj4ever@seoul.go.kr	/	대시민공개