문서번호	시설개선과-8952
결재일자	2018.10.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설개선과장	체육시설관리사업소장
안봉환	정경수	10/26 박영준
협 조
	운영기획과장		김남대
	주무관		이경수

잠실 주.보조경기장 그라운드 잔디 교체공사

실시설계용역 발주계획

2018. 10.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실 주.보조경기장 그라운드 잔디교체공사

실시설계용역 발주계획

제100회 전국체전을 대비하여 각종 행사 및 콘서트로 훼손된 주,보조경기장 그라운드 잔디를 일체 정비하여 최고의 그라운드 컨디션을 제공코자 함.

Ⅰ		사업추진 배경

□ 추진근거

******************************************

************************

*******************************************

************************

□ 추진배경

❍ 각종 행사, 콘서트 이용시 잔디 훼손, 토층내 불순물 유입 등으로 잔디밀도 저하 및 생육환경 불량으로 그라운드 잔디 전면교체 필요

❍ 시설물설치 등에 따른 답압증가, 다회 배토로 상부 토사량 증가로 경도 및  지면 높이 상승으로 식재층 일체 정비 필요

□ 추진방향

❍ 2019년 제100회 전국체육대회의 성공적 개최 준비

❍ 조기완공, 효율적인 시공을 위해 유사사업 통합 추진

❍ 2019년 조기발주 시행을 위한 2018년내 사전 설계 실시

□ 현황사진

주경기장	보조경기장	주.보조 주변녹지대

Ⅱ		사업계획

*******

************************************************

**************************************

**************************************************

*************************************

********************************************

**********************************

****************************************************

*************************************************

***********************************

*******

*******************************

******************

*******************************************

*******************************************

Ⅲ		용역개요

□ 용역개요

❍ 용역명 : 2019년 잠실주.보조경기장 그라운드 잔디교체공사 실시설계용역

❍ 용역내용 :

- 현장 조사와 타구장 사례조사 등 자료 수집.검토

- 식재층 조사분석 등을 통한 토량 개선방안 검토

- 잔디식재, 잔디이식 등 실시내역 설계

- 폐토사 활용한 잠실 주.보조경기장 주변 불량환경개선 사업 추진

❍ 용역기간 : 착수일로부터 30일간

□ 추진일정

❍ 2018. 10월 : 설계용역 추진계획 수립

❍ 2018. 10월 : 기술용역타당성 심사 요청(기술심사담당관)

❍ 2018. 11월 : 용역발주 및 착수, 용역(중간)보고

❍ 2018. 12월 : 실시설계 용역 준공

Ⅳ		발주계획

***************

************************************************************************************

*******************

**************************************************

***************************************************

***********************

Ⅴ		향후계획

□ 실시설계 용역 성과품을 활용하여 잠실주.보조경기장 그라운드 잔디 교체공사 통합발주 시행

❍ 2018. 12. : 계약심사, 일상감사 등

❍ 2018. 01. : 공사발주

❍ 2018. 02∼06. : 공사 시행

덧붙임 : 1. 2019년 체육시설관리사업소(조경분야) 시설개보수 추진계획 1부.

2. 실시설계용역 발주도서 각 1부. 끝.