투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연장의뢰(보라매공원 테마 물놀이터 조성공사 폐기물처리 용역)

1. 시설과-2704(2018.10.25.)호와 관련입니다.

2. 「보라매공원 테마 물놀이터 조성공사 폐기물처리 용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연장을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 보라매공원 테마 물놀이터 조성공사 폐기물처리 용역

나. 계 약 일 : 2018. 09. 04.

다. 계약금액 : 9,700,000원(금구백칠십만원)

라. 계약업체

- 운  반 : ***************************

- 처  리 : ****************************

마. 준공기한 연기

- 당  초 : 2018. 09. 07. ~ 2018. 10. 31.

- 변  경 : 2018. 09. 07. ~ 2018. 12. 08.

바. 지체상금 부과검토

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임  1. 준공기한 연장 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 용역사 준공기한 연기 요청서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	여은솔		시설관리팀장	김영균		시설과장	10/26 진병규
협조자
시행	시설과-2709	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 시설과 (신대방동)	/
전화	02-2181-1159	/전송	02-2181-1169	/		/	부분공개(6)