문서번호	토목부-18333
결재일자	2018.10.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
남덕희		명경출	10/29 김영수
협조

오수관로(가압관로) 설치 검토보고

(노들섬 특화공간 조성 토목공사)

2018. 10.

도시기반시설본부

(토 목 부)

오수관로(가압관로)설치 검토보고

[노들섬 특화공간 조성 토목공사]

노들섬 부지내 오수처리시설 선형변경(오수처리시설 처리+한강방류→정화조+가압관로+하수종말처리장) 결정으로 우리 본부 설비부 공사계약내역에 포함된 공사를  본 공사 내역에 반영하고자 검토 보고드림

노들섬 특화공간 조성 토목공사

❍ 공사규모 : 옹벽보수공사 10,137㎡, 보도육교설치 B=3.5m, L=139m, 우수관 979m, 오수관 467m

❍ 도 급 비 : 금6,099백만원 (2차 : 금3,463백만원)

❍ 공사기간 : `17.11.15.~`19.4.27.(2차 : `18.6.27.~`19.4.27.)

❍ 시 공 사 : 신성종합건설(주) 외 2  ❍ 감 리 사 : ㈜아이티엠코퍼레이션

감리단 검토의견

(오수관로 설치계획도)

❍ 당초 노들섬내 정화조 처리후 한강방류로 되어있었으나 2017.7월 도기본 설비부 검토요청에 따라 공공재생과, 교량안전과에서 협의하여 한강대교에 설치하기로 2017.11월 결정처리됨

❍ 또한 세부설치 위치 검토결과는 교량안전과와 우리 부에서 교량 상부 좌측보도에 설치하기로 2018. 8월 협의완료함

□ 검토내용

❍ 오수처리방법 변경

구 분	당 초	변 경
오수처리시설	오수처리시설 처리후 한강방류	정화조 + 가압관로 + 하수종말처리장
우수관로	맨홀 + PVC오수관	맨홀 + PVC오수관 + 가압관로

❍ 주요 수량 증감

품 명	규 격	단위	당초	변경	증·감
가압관로보호공사
면적당 규준틀		M2	-	165	증 165
건축물 현장정리	철골조	M2	-	165	증 165
일반구조용 각형강관	50×50×2.3	M	-	3,313	증 3,313
잡철물 제작 설치	보통	ton	-	11,805	증11,805
앵커볼트 설치	∮16이하	ton	-	1,564	증 1,564
녹막페인트	철재면1회1종	M2	-	676	증 676
2. 가압관로배관공사
배관용스테인레스강관	D150×3T	M	-	744	증 744
스텐관용접	D150	개소	-	138	증 138
인서트플레이트	150×150×6T	개소	-	296	증 296
잡철물제작설치	간단	TON	-	0.974	증 0.974
볼조인트설치공사		EA	-	8	증 8
노무비	보통인부	인	-	92	증 92
노무비	배관공	인	-	219	증 219

❍ 단가 적용

- 신규비목에 대하여 협의율(낙찰률 85.83%+100)/2=92.91%) 적용

❍ 공사비 증감(장기 2차)

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감
가압관로(오수)공사	-	331,999	증 331,999
직접공사비	-	331,999	증 331,999
제 경 비	-	98,085	증 98,085
이 윤	-	31,643	증 31,643
공급가액	-	461,727	증 461,727
부가가치세	-	46,172	증 43,172
도 급 액	-	507,899	증 507,899

조치의견

❍ 감리단 검토의견과 같이 보고내용이 타당하므로 승인처리하고자 하며 설계변경자문회의(소위원회)에 상정한 후 자문결과에 따라 향후 설계변경시 반영, 정산처리하고자 함

붙임 : 감리단 검토보고서 1부.  끝.