과 장		10/29 유태용	심사자	정회곤		설계자	박성근		설 계	심 사		결 재
									2018년10월26일	2018년10월29일
설 계 변 경 서(제3회)
	공 사 명 : 2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)
	구 분				금 액						비 고
					당 초			변 경			증.감
	총 공 사 비				금 969,796,550원			금 980,880,550원			증) 11,084,000원
	도급비	공 급 가 액			금 647,940,000원			금 657,364,546원			증) 9,424,546원
		부 가 가 치 세			금 64,794,000원			금 65,736,454원			증) 942,454원
		계			금 712,734,000원			금 723,101,000원			증) 10,367,000원
	관 급 비				금 256,576,000원			금 257,293,000원			증) 717,000원
	이설비 및 기타				금 486,550원			금 486,550원			-
공사개요 - 당 초 : 차선도색 L=287,000m, 차선제거 L=19,000m, 도로표지병 설치 N=380개, 도로표지병 제거 N=200개 - 변 경 : 차선도색 L=289,400m, 차선제거 L=16,100m, 도로표지병 설치 N=180개, 도로표지병 제거 N=140개