투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	남촌놀이터 CCTV 공사 설계변경(최종) 시행

1. 시설과-4960(2018.10.29.)호와 관련한 내용입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 『남촌놀이터 CCTV 공사』  설계변경(최종)을 아래와 같이

시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 남촌놀이터 CCTV 공사

나. 공사기간 : 2017. 12. 15 ~ 2018. 10. 31

****************************

라. 설계변경(정산) 내역

(단위:원)

구 분		변경전	변경후	증 감	비고
도급비	공급가액	11,586,155	8,676,091	감)2,910,064
	부가가치세	1,158,615	867,609	감)291,006
	합 계	12,744,770	9,543,700	감)3,201,070

마. 예산과목

- 공공재생과, 공공재생계획수립, 공공개발 및 공공공간 확충, 서울역 일대 도시재생사업 추진, 시설비(재배정)

붙임  1. 설계변경(최종) 검토보고 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.

주무관	이우진		기전팀장	김석광		시설과장	10/29 김재균
협조자	재무팀장	김기중
시행	시설과-4968	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231(예장동) 남산1별관	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	(02)3783-5973	/전송	(02)3783-5969	/	leewj70@seoul.go.kr	/	부분공개(5)