문서번호	도로보수과-9834
결재일자	2018.10.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
박성근		전결 10/29 유태용
협조

2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사
설계변경 검토보고(제3회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

강서도로사업소

(도로보수과)

2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

설계변경 검토보고(제3회)

우리사업소에서 시행중인『2018년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사』시책사업(주행유도선) 완료 및 공종별 물량 증·감이 발생되어 설계변경을 시행하고자 함.

Ⅰ		관련근거

○ ‘18년 주행유도선 확대설치에 따른 노면표시 시행계획 보고【6537호(‘18.7.18.)】

○ ‘18년 주행유도선 확대설치사업 작업완료 보고【7479호(‘18.8.17.)】

Ⅱ		사업개요

○ 공 사 명 : 2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 공사개요 : 차선도색 및 제거 L=306,000m,
도로표지병 설치 및 제거 N=580개소

○ 공사기간 : 2018. 3. 8. ~ 2018. 12. 31.

○ 공 사 비 : 969,796천원

(도급비 712,734천원, 관급비 256,576천원, 이설비 486천원)

○ 도 급 자 : (주)세흥실업  대표 김덕자

Ⅲ		공사현황

○ 주요공종 변경 현황

연번	공 종	단위	수 량		비고(사유)
			당 초	변 경
1	차선(재)도색	m	287,000	289,400	시책사업(주행유도선) 완료 및 공종별 물량 변경
2	차선제거	m	19,000	16,100
3	차로밑그림	m	52,000	49,600
4	도로표지병 설치	개소	380	180
5	도로표지병 제거	개소	200	140

○ 사업비 변경 현황

(단위 : 원)

구 분	당 초	변경	증·감
총 공사비	969,796,550	980,880,550	증) 11,084,000원
도 급 비	712,734,000	723,101,000	증) 10,367,000원
관 급 비	256,576,000	257,293,000	증) 717,000원
이설비및기타	486,550	486,550	-

○ 예산 현황

(단위 : 천원)

구 분	사 업 비				비고
	계	도급비	관급비	이전비
계	980,880	723,101	257,293	486
노면표시 본공사	784,356	577,034	206,836	486	교통사업특별회계
‘18년 포장도로 긴급복구공사	117,722	90,900	26,822	0	도시개발특별회계
‘18년 포장도로 굴착복구공사	62,673	44,800	17,873	0	도로굴착복구기금
주행유도선 확대설치	16,129	10,367	5,762	0	교통사업특별회계

※ 주행유도선 확대설치 정산시 자재단가 변동금액 반영(증 576천원)

Ⅳ		조치계획

○ 시책사업(주행유도선 확대설치 사업) 및 현장여건 변화에 의한 공종별 물량(관급자재 포함) 증·감을 반영하여 위와 같이 설계변경을 시행하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서(제3회) 1부.

2. 주행유도선 확대설치 사업 시행계획 및 완료보고 각 1부.