문서번호	방재시설부-13728
결재일자	2018.10.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설과장	방재시설부장
김달용		신용우	10/29 이임섭
협 조

『소방행정타운 건립공사(1단계)』

조경공사 관급자재 수급방법 변경 실정보고

2018. 10.

도시기반시설본부

(방재시설부)

『소방행정타운 건립공사 (1단계)』

조경공사 관급자재 수급방법 변경 실정보고 검토보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

『소방행정타운 건립공사(1단계)』건설사업관리단장으로 부터 조경

관급자재(흡연부스 등) 물량에 대한 수급방법 변경 실정보고가 있어

검토하여 보고 드림. [관련공문 : 소방(CM)제18-461호(‘18.10.24)]

Ⅰ		공사개요

○ 위    치 : 은평구 진관동 110-26 일원

○ 규    모 : 건축물 6동, 지하2층/지상15층, 연면적 25,174㎡

□조경공사 : 수목식재(교목1,693주, 관목38,300주), 조경시설 15종 등

○ 기    간 : 2016.05.18.~2019.06.30. (2단계 : ‘19.9월 준공)

○ 도 급 비 : 252억원 (조경 10.8억원)

Ⅱ		실정보고

○ 관련근거

□과업내용서(2016.02) 11-다(공사비관리)

□건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제97조(설계변경관리)

□지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

□동광소방 *******01호 조경공사 관급자재 사급전환 요청

(흡연부스, 모래, 이형철근, 자갈 : 2018.10.19)

□회의록-관급자재 사급자재 전환 (2018.06.20)

○ 전환사유

- 흡연부스(2개소)는 조달청 종합쇼핑몰 및 가격정보 미기재 항목

- 모래, 이형철근, 자갈은 소량으로 조달요청 및 자재관리 어려움

○ 설계적용

- 사급자재(부가세 계상)로 전환하고 시장조사 최저가격으로 적용

○ 공사비 승인요청                                  (단위 : 천원)

구 분	단 위	당 초 (관급)		변 경 (사급)		증․감
		수 량	금 액	수 량	금 액
흡연부스	개소	2	26,800	2	24,361	감)2,439
모 래	㎥	119	2,856	119	2,594	감)262
이형철근	Ton	1.6	1,098	1.6	997	감)101
자 갈	㎥	10	230	10	208	감)22
조달수수료(0.54%) 부가가치세 (10%)			167		2,816	증)2,649
계			31,151		30,976	감)175

Ⅲ		검토보고

○ 관급자재 사급전환

□흡연부스는 소방재난본부의 요청으로 설계 되었으나, 흡연부스 제품

자체가 조달청 종합쇼핑몰 이나 가격정보에 기제되어 있지 않고

□조경공사 시설물 설치에 소요되는 모래, 이형철근, 자갈은 구매수량이

소량이며, 다양한 구조물에 사용시기 또한 상이하여

□시공과 공정관리에 사급전환이 유리할 것으로 사료됨

○ 설계변경 적용

□상기 사유로 인한 사급자재 단가는 가격정보와 시중물가지, 견적서 등

3개 이상 조사가격의 최저가로 산정하여 부가가치세 계상

Ⅳ		보고자 의견

○ 건설사업관리단이 제출한 조경 관급자재 사급 전환 요청에 대해 검토한

결과 현장여건을 반영한 변경으로 판단되어, 실정보고를 승인조치하고

○ 변경에 따른 공사비 증․감 부분은 추후 설계변경시 반영하고자 합니다.

붙임 : 건설사업관리단 기술검토 의견서 1부.  끝.