투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	면목천복개구조물 보수공사 설계변경 시행

우리 사업소에서 시행중인 ‘면목천복개구조물 보수공사’에 대하여 감독기관의 요청에 따라 아래와 같이 설계변경을 시행하여 공사에 만전을 기하고자 합니다.

가. 공 사 명: 면목천복개구조물 보수공사

나. 공사기간: 2018. 5. 8.~2018. 11. 3.

다. 도 급 사: 레오개발(주)  대표 양공진

라. 설계변경내역

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총 공사비		522,089,000	590,055,000	증 67,966,000
도급비	공급 가액	394,062,728	445,010,000	증 50,947,272
	부가가치세	39,406,272	44,501,000	증 5,094,728
	계	433,469,000	489,511,000	증 56,042,000
관급자재비		55,000,000	59,624,000	증 4,624,000
이 전 비		33,620,000	40,920,000	증 7,300,000	건설폐기물 등

마. 설계변경사유:

- 추가구간 교면방수 및 아스팔트 포장 물량증가

- 중앙분리대 철거 및 재설치

- 방수재 가열 및 용융 PS단가 적용분 정산 반영(교량안전과 품셈작성)

바. 예산과목: 도로시설관리, 하천복개구조물 관리, 면목천복개구조물 보수,

시설비 및 부대비, 시설비

붙임  설계변경 내역서(증빙자료 포함) 1부. 끝.

주무관	최태석		시설보수과장	박춘배		성동도로사업소장	10/29 신상식
협조자	주무관	代정용재		주무관	이현은		관리단속과장	박영종
시행	시설보수과-3594	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 (용답동)	/
전화	02-2210-1551	/전송	02-2210-1562	/	choitaeseog@seoul.go.kr	/	부분공개(6)