문서번호	시설과-4960
결재일자	2018.10.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설과장
이우진	김석광	10/29 김재균

『남촌놀이터 CCTV 공사』 설계변경(최종) 검토보고

2018. 10

중부공원녹지사업소

(시설과)

『남촌놀이터 CCTV 공사』  설계변경(최종) 검토보고

「남촌놀이터 CCTV 공사」의 작업물량 변경 및 신규공종 추가로 인한 최종 설계변경 사항 보고 임.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 남촌놀이터 CCTV 공사

************************************

*****************************

❍ 계약일자 : 2017. 12. 15

❍ 착공일자 : 2017. 12. 15

❍ 준공기한 : 2018. 10. 31

□ 설계변경 주요사유

❍ 남촌놀이터 CCTV 공사 중 작업 물량 및 경비 변경

□ 설계변경 내용

❍ 설계변경 금액                                         (단위:원)

구 분		변경전	변경후	증 감	비고
도급비	공사원가	11,586,155	8,676,091	감)2,910,064
	부가가치세	1,158,615	867,609	감)291,006
	계	12,744,770	9,543,700	감)3,201,070

❍ 예산과목

- 공공재생과, 공공재생계획수립, 공공개발 및 공공공간 확충, 서울역 일대 도시       재생사업 추진, 시설비(재배정)

□ 보고자의견

❍ 위 상기 변경사항에 대하여 설계변경(최종)계약 시행하고자 함.

붙임  설계변경 내역서 1부.  끝.