＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	영등포아리수정수센터
수신자	정수시설과장
(경유)
제 목	변경계약체결[풍납취수장 취수구주변 조류차단막 철거및설치공사]보고 및 통보

1. 정수시설과-9461(2018.10.26.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 아래과 같이 변경계약체결 되었음을 보고합니다(알려드립니다).

가. 건   명 : 풍납취수장 취수구주변 조류차단막 철거 및 설치공사

나. 변경사유 : 사급자재비 감 및 보험료 정산

다. 변경내역

당 초			변 경
계약체결일	계약기간	계약금액(원)	변경계약 체 결 일	계약기간	계약금액(원)
2018.05.15.	2018.05.18.~ 2018.10.31	14,332,000	2018.10.29	2018.05.18.~ 2018.10.31	12,991,000

붙 임 : 계약체결서류 1부.  끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	박소현		행정관리과장	이상봉		영등포아리수정수센터소장	10/29 이성락
협조자
시행	행정관리과-11005	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 영등포아리수정수센터	/
전화	3146-5611	/전송	3146-5691	/	jungeunpk@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)