투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	공사 및 건설폐기물처리 용역 준공기한 연기의뢰

1. 서울대공원 중점사업으로 추진중인 「제3아프리카관 환경개선공사」 및 「제3아프리카관 환경개선공사 건설폐기물 처리용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사 및 용역내역                                                        (단위:원)

공사(용역)명	사업기간	계약금액		계약자	비고
제3아프리카관 환경개선공사 (장기-총차,1,2차)	총차: ‘17.12.15.∼’18.9.30. 1차 : ‘17.12.15.∼’18.9.30. 2차 : ‘17.12.15.∼’18.9.30.	**	***************** **************** ****************	【토목】 ********* ****** 【조경】 ********* ******
		**	***************** **************** ****************
		**	**************** *************** ***************
제3아프리카관 환경개선공사 건설폐기물처리용역	‘18. 03.02.∼ 10.30.	**********		******* ******

나. 준공기한 변경(연기) 내역

공사(용역)명	변경사항		비고
	당 초	변 경
제3아프리카관 환경개선공사 (장기-총차,1,2차)	총차: ‘17.12.15.∼’18.10.30. 1차 : ‘17.12.15.∼’18.10.30. 2차 : ‘17.12.15.∼’18.10.30.	총차: ‘17.12.15.∼’18.11.20. 1차 : ‘17.12.15.∼’18.11.20. 2차 : ‘17.12.15.∼’18.11.20.
제3아프리카관 환경개선공사 건설폐기물처리용역	‘18.03.02.∼ 10.30.	‘18.03.02.∼ 11.20.

· 귀책소재 : 서울대공원

· 지체상금 부과여부 : 미부과

다. 준공기한 변경(연기) 사유

【제3아프리카관 환경개선공사(장기-총차,1,2차) 】

- 동물 시험방사 이후 동물원에서 방사장내 수목 식재 추가 요청에 따른 절대공기 부족.

【제3아프리카관 환경개선공사 건설폐기물처리용역】

- 본 공사(제3아프리카관 환경개선공사,랫서팬더방사장 조성공사)의 준공기한 연기에 따른 과업기간 연기.

붙임 :  1. 준공기한 연기 의뢰서 각 1부.

2. 준공기한 연기검토 보고서 각 1부.

3. 합의각서 각 1부. (별첨)  끝.

	시설과장
주무관	한상길		시설과장	10/29 代이춘한
협조자
시행	시설과-6615	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02)500-7440	/전송	02)507-7230	/		/	부분공개(7)