문서번호	교통운영과-18249
결재일자	2018.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통안전팀장	교통운영과장
손태빈		김세교	10/29 강진동
협조

‘18년 교통사고 잦은 곳 실시설계용역 2차 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10

‘18년 교통사고 잦은 곳 실시설계 용역 2차 시행계획

행정안전부 지역교통안전환경개선사업 국고보조금 증가에 따라 사고 잦은 곳 개선 사업비의 증가로 실시설계 용역을 추가 시행하여 ’19년 개선사업 시행 및 시민의 교통사고 예방에 만전을 기하고자 함

1				사업개요

추진근거

❍ 행정안전부 2019년 지역교통안전환경개선 사업계획 수립지침

❍ 국고보조금액의 증가로 사업비가 ’18년 714백만원(추경포함 2,274백만원)에서 ’19년 5,934백만원으로 증가함에 따라

❍ 당초 교통사고 잦은 곳 개선사업 실시설계용역 1차를 발주하여 시행(15개지점, 개략공사비 1,783백만원)하고 있으나 사업대상지 추가 선정 필요

추진방향

❍ 최근 3년간(’15~’17년) 도로교통공단 교통사고 잦은 곳 기본개선 계획 대상 지점 중 기 사업완료 및 타 사업 등으로 사업이 어려운 지점을 제외하고 EPDO 상위 60개 지점 선정

❍ 효과적인 설계 업무 수행을 위해 1·2구역으로 구분하여 시행

❍ 시행절차

- 도로교통공단에서 발표한 기본개선계획을 바탕으로 현장 조사 및 유관기관 협의 후 실시설계 시행, 2019년 공사시행

2				추진방법

발주방법 : 제한경쟁입찰(지역)

❍ 입찰 참가 자격

-『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 참가자격을 갖춘 업체

-『엔지니어링산업진흥법』제21조 및 같은 법 시행령 제3조의 규정에 따라 건술부문 중 2개 전문분야(도로 및 공항, 교통)에 사업자로 신고를 필하였거나『기술사법』제6조 규정에 의하여 건설부문의 2개 직무 범위에(도로 및 공항, 교통) 등록하고,  현재 주된 사무소가 서울특별시에 소재한 업체

- 전력기술관리법 제11조, 제14조 및 같은 법 시행규칙 제25조의 규정에 의한 전문 설계업 2종(종합설계업·전문설계업 1종 포함)을 등록한 업체

❍ 기술 상호보완을 위하여 공동도급 가능(분담이행)

소요예산 : 246,059천원

- 1구역 : 동대문구 제기동 교차로 등 30개 지점 114,653천원

- 2구역 : 강서구 화곡본동입구 등 30개 지점 131,406천원

용역기간 : 계약일로부터 5개월

예산과목(교통사업특별회계)

- 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화,

교통사고 잦은 곳 개선, 시설비(401-01)

3				세부 추진계획

❍ ’18.10 ~ ’18.11 : 실시설계 용역 타당성 검토 및 발주

❍ ’18.11 ~ ’19.04 : 실시설계 용역시행 및 교통안전시설 심의

❍ ’19.05 ~ ’19.11 : 개선사업 대상 지점 예산 재배정 및 공사시행

붙 임 : 설계내역서 및 과업내용서 각1부.  끝.