문서번호	시설보수과-5934
결재일자	2018.10.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
이생기		윤승범	10/29 이성재
협조

『청계천 좌안 차집관로 정밀안전진단 용역』 실정보고서 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.10.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『청계천 좌안 차집관로 정밀안전진단 용역』

실정보고서 검토보고

우리센터에서 추진중인 『청계천 좌안 차집관로 정밀안전진단 용역』의 도급자로 부터 실정보고서가 접수되어 이에 대한 검토 보고임

[건양18-474호(2018.10.25.)]

1		용역개요

□ 용역명 : 청계천 좌안 차집관로 정밀안전진단 용역

□ 용역기간 : ‘18.07.02 ~ ’18.11.20

□ 용 역 비 : ***********

□ 도 급 자 : *******************

□ 용역내용 : 차집관로 정밀안전진단 용역(규모: A2.8x2.8 B2.4x2.4m L=1,108m)

2		실정보고 내용

□ 용역 과업수행을 위해 하수암거 안전성 평가에 필요한 기존 도면이 없어

과업수행에 어려움이 발생함.

□ 용역 수행에 필요한 도면을 제작하고 발생 비용은 설계변경시 반영 필요함.

(근거 : 안전점검 및 정밀안전진단 대가(비용산정) 기준(제9조관련 별표7))

실측도면 작성범위	적용비율(%)
기본도면(평면도,종·횡단면도, 입면도 등) 작성시	10
기본도면+부재별 상세구조도 등 정밀 도면작성시	20

□ 도면제작내용

- 도면제작 제원 : A라인(2.9x2.9)~B라인(2.4x2.4) L=L=1,126m

□ 대가 산출기준 : 시설물의 관련도면 자료가 없어 구조물 상세도면제작 할시                     용역비의 20%(15,400천원) 증액 소요.

3		검토결과

□ 시설물의 관련도면 자료가 없어 구조물 상세도면제작시 용역비의 20%

(15,400천원) 증액이 필요하나, 우리센터 예산 등을 감안 9.5%(7,328천원)         증액으로 조정.

*******************************************************

4		조치의견

□ “청계천 좌안 차집관로 정밀안전진단 용역“ 과업수행에 필요한 도면을 제작

하여 용역수행 및 추후 하수암거 시설물 관리에도 만전을 기 하고자 함.

□ 위 사항을 용역 계약업체 *****************에게 통보 하고자 함.

붙임 : 실정보고서 1부.  끝.