투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	도시철도 9호선 3단계 923공구 건설공사 책임감리원
(경유)
제목	9호선 3단계 923공구 전기공사 실정보고 승인 알림

1. 도시철도 9호선 3단계 923공구 실정보고(2018.10.22.)와 관련입니다.

2. 귀 감리단에서 제출한 실정보고를 원안대로 승인하오니, 철저한 공정관리 및 품질관리로 개통일정에 차질이 없도록 관리·감독하여 주시기 바랍니다.

3. 실정보고 승인사항

순	문서번호	제 목	비고
1	동명감923(전)제2018-030호	무정전 전원장치(UPS) 용량축소 검토보고
2	동명감923(전)제2018-031호	승강장 축소에 따른 전기공사 검토보고
3	동명감923(전)제2018-032호	정거장 수익시설(상가,광고) 설치에 따른 실정 보고
4	동명감923(전)제2018-033호	승강장 승무원 화장실 설치에 따른 실정보고
5	동명감923(전)제2018-034호	FULL BOX 용융아연도금 실정보고
6	동명감923(전)제2018-035호	이동통신 용량변경 실정보고
7	동명감923(전)제2018-036호	역구내 터널등 신설 실정보고

4. 설계변경에 따른 공사비는 향후 설계변경 자문위원회 자문을 거쳐 반영.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	신용준		시설전기과장	이덕한		도시철도설비부장	10/30 代이덕한
협조자
시행	도시철도설비부-10071	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 천계천로 8(무교동96번지)프리미어플레이스 빌딩 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7282	/전송	02-772-7308	/	yongjoon.shin@seoul.go.kr	/	대시민공개