문서번호	조경과-14309
결재일자	2018.10.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	조경시설팀장	조경과장
현호재	代현호재	10/30 문길동

- 2018년 물을 이용한 친수공간 조성사업 추진 관련 -

설계변경에 따른 예산 추가 지원 검토보고

2018. 10

푸른도시국

(조경과)

- 2018년 물을 이용한 친수공간 조성사업 추진 관련 -

설계변경에 따른 예산 추가 지원 검토보고

『2018년 물을 이용한 친수공간 조성사업』관련 동대문구 장안동 467번지 군자교 녹지대 물을 이용한 친수공간 조성공사 설계변경에 따른 공사비 추가 지원 요청 건에 대하여 검토하고 아래과 같이 결과보고 드림

- 동대문구 공원녹지과-169996(‘18.10.25.)호와 관련임 -

1		사업개요(시 총괄)

◯ 사 업 명 : 2018년 물을 이용한 친수공간 조성

◯ 위    치 : 용산구 원효로 113-59 원효대교 북단 녹지대 등 7개소

◯ 기    간 : 2018. 1 ~ 12.

◯ 내    용 : 노후 수경시설 재정비, 신규 수경시설 조성, 수목식재 등

(기존시설 재정비 5개소, 신규 조성 2개소)

◯ 총사업비 : 1,965,000천원(시설비 1,960,000 시설부대비 5,000)

(단위: 천원)

예산과목	예산액	집행액	집행잔액	비 고
시설비	1,965,000	1,877,628	87,372
시설부대비	5,000	5,000	0

2		설계변경 대상지 개요(동대문구)

◯ 사 업 명 : 2018년 물을 이용한 친수공간 조성 및 녹화사업

◯ 위    치 : 동대문구 장안동 467번지 일대 군자교 녹지대

◯ 기    간 : 2018. 7 ~ 11.

◯ 내    용 : 노후 수경시설 재정비, 편의시설 설치, 수목 식재 등

◯ 도 급 비 : 409,243천원

◯ 위치도 및 현황사진

위 치 도	현 황 사 진

3		검토결과

◯ 옥외 상부수조 노즐 제수변 외 설비시설 추가 보완, 실개천 폭 조정 및

방수 포장 등 현장여건을 감안한 설계변경 발생으로 공사비 증가

(단위: 천원)

사 업 명	기 배정액	낙찰 차액 (A)	공사비 증액 (B)	부족 금액 (B-A)	비 고
계	545,483	56,901	86,901	30,000
물을 이용한 친수공간 조성	279,628	32,941	62,941	30,000
가로변 녹지량 확충	265,855	23,960	23,960	-

※ 시설공사 현장감리 위탁기관인 서울시시설관리공단 실정보고서 [별첨4] 참조

4		조치계획

◯ `18.10.30 : 설계변경 승인 통보 및 예산(공사비) 추가 지원

◯ `18.11.30 : 시설공사 준공보고(구 → 시)

붙임 : 공사비 추가 지원 요청 공문(동대문) 1부.  끝.