＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(영등포2정수장 과산화수소 주입설비 제조구매 설치)

우리 기전설비과에서 시행 중인 『영등포2정수장 과산화수소 주입설비 제조구매 설치』에 대하여   아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 계약현황

1) 건    명 : 영등포2정수장 과산화수소 주입설비 제조구매 설치

2) 계약기간 : 2018. 6. 4. ~ 2018. 11. 1.

3) 계약금액 : 금307,168,700원

4) 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비

5) 계 약 자 : ㈜아큐스 대표 이희헌

나. 설계변경 내역 : 계약금액 변경

- 당  초 : 금307,168,700원

- 변  경 : 금308,808,000원

- 증  액 : 금   1,639,300원

다. 설계변경 사유

- 물량변경 및 보험료 정산 등이 발생하여 계약금액 증액 필요

붙  임 : 1. 설계변경 계획 보고서 1부.

2. 설계변경 심의 소위원회 결과 보고서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 합의서 1부. 끝.

주무관	곽대근		기전설비과장	조성태		생산부장	10/30 유성종
협조자	주무관	정혜원		주무관	안희숙
시행	기전설비과-8383	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1338	/전송	02-3146-1319	/	gwak0914@seoul.go.kr	/	부분공개(5)