투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사 감리단장
(경유)
제목	9호선 3단계 918공구 건설공사(전기) 실정보고 승인 알림

1. 9호선 3단계 918공구 건설공사(전기) 실정보고[서영감리제2018-619-1호(2018.10.15.), 서영감리제2018-627호(2018.10.19.), 서영감리제2018-628호(2018.10.19.), 서영감리제2018-621-1호(2018.10.15.), 서영감리제2018-645호(2018.10.26.), 서영감리제2018 -646호(2018.10.26.), 서영감리제2018-620호(2018.10.15.)]와 관련됩니다.

2. 귀 감리단에서 제출한 아래 실정보고 건에 대하여 책임건설사업관리기술자의 검토의견과 같이 승인하오니 철저한 공정관리 및 품질관리로 개통일정에 차질이 없도록 관리감독에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 실정보고 승인내용

연번	문서번호	실정보고 내용
1	서영감리제2018-619-1호 서영감리제2018-627호	환기소(930S1) 점검통로와 대피로 통합에 따른 전기․소방 설비 변경
2	서영감리제2018-628호	승강장 축소구간 소방전기 설비 변경
3	서영감리제2018-621-1호	풀박스 용융아연도금 적용
4	서영감리제2018-645호	수배전반 내진설비 설치
5	서영감리제2018-646호	외부출입구 조명기구 설치
6	서영감리제2018-620호	정거장 터널구간 조명기구 설치

※ 설계변경에 따른 공사비는 향후 본부 설계변경자문위원회 자문을 거쳐 반영.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
담당자	김동기		시설전기과장	이덕한		도시철도설비부장	전결 10/30 代이덕한
협조자
시행	도시철도설비부-10077	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8(무교동96번지) 프리미어플레이스 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)772-7283	/전송	02)772-7308	/		/	대시민공개