투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	9호선3단계 921공구 책임감리원
(경유)
제목	9호선 3단계 921공구 건설공사(전기) 실정보고 승인 알림

1. 9호선 3단계 921공구 건설공사(전기) 실정보고[유신감(921)18-760호(2018.10.15.), 유신감(921)18-761호(2018.10.15.), 유신감(921)18-762호(2018.10.15.), 유신감(921)18-763호(2018.10.16.), 유신감(921)18-764호(2018.10.17.), 유신감(921)18-766호(2018.10.17.)]와 관련입니다.

2. 귀 감리단에서 제출한 아래 실정보고 건에 대하여 책임건설사업관리기술자의 검토의견과 같이 승인하오니 철저한 공정관리 및 품질관리로 개통일정에 차질이 없도록 관리감독에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 실정보고 승인내용

연번	문서번호	실정보고 내용
1	유신감(921)18-760호	○ 환기휀 기동장치 추가
2	유신감(921)18-761호	○ 수배전반 내진대책 반영 ○ 분전반 도어 도색
3	유신감(921)18-762호	○ 지하부 역구내 터널등 추가
4	유신감(921)18-763호	○ 철도시설물 기술기준 적용 ○ 풀박스 용융도금
5	유신감(921)18-764호	○ 이동통신 전원용량 증설 ○ 수익시설 설치
6	유신감(921)18-766호	○ 출입구 등기구 추가

※ 설계변경에 따른 공사비는 향후 본부 설계변경자문위원회 자문을 거쳐 반영.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박지영		시설전기과장	이덕한		도시철도설비부장	10/30 代이덕한
협조자
시행	도시철도설비부-10092	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 청계천로8 프리미어플레이스빌딩 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7280	/전송	772-7308	/	qkr1310@seoul.go.kr	/	대시민공개