아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다. -공모당선작 최우수-
	암사아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	공사설계변경 시행(정산)

1. 우리 센터에서 시행중인『고도정수시설 회수조증설설비 전기공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 고도정수시설 회수조증설설비 전기공사

나. 공사기간 : 2017.4.14 ~ 2017.9.30

다. 도 급 액 : 68,095,340원

라. 도 급 자 : 주식회사 말타니 대표 이세용

마. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산, 기계장치, 시설및부대비 시설비

(고도정수시설 회수조증설설비 전기공사)

바. 하자기간 : 준공일검사일부터 1년

사. 설계변경 내역(도급비)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 · 감
도 급 비	68,095,340원	76,677,000원	증)8,581,660원

아. 설계변경 사유 : 시공물량 증·감 및 보험료 정산

※ 2017. 9.25 증 추산필 (번호 7356, 2017. 3.28)

붙임 : 1) 변경설계 내역서 1부

2) 설계변경 검토보고서 1부

3) 합의서 1부.  끝.

주무관	김상훈		주무관	김덕기		정수시설과장	남효돈		암사아리수정수센터소장	09/25 가길현
협조자	주무관	김희수		주무관	변민용
시행	정수시설과-5108	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	201005110@seoul.go.kr	/	부분공개(5)