문서번호	교통운영과-8874
결재일자	2018.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		BRT팀장	교통운영과장
류근호		전태호	05/28 강진동
협조
	주무관		조혜진

송파대로 교차로 소통개선 사업 예산 재배정 검토 보고

2018. 5.

도시교통본부

(교통운영과)

송파대로 교차로 소통개선 사업 예산 재배정 검토 보고

송파대로 교차로 소통개선 사업 관련 가로변 버스정류소 신설 및 녹지 시행부서 조정 등에 따른 예산 재배정 검토 보고드림.

□ 공사 개요

○ 위    치: 송파대로 복정역교차로 ~ 잠실역사거리 주변

○ 사업기간: 2017. 3. ~ 2018. 11

○ 사업구간: 연장 5.5㎞(폭 8~10차로)

○ 사 업 비: 1,800백만원

○ 사업내용: 버스정류장 용량 확대 및 교차로 구조개선, 신호체계 개선 등

□ 재배정 변경 사유(설계변경)

○ 가로변 버스정류소 신설(장지역 2번출구 앞)

- 송파대로 축의 첫 중앙정류소인 장지역 버스정류소의 혼잡 해소를 위한 가로변 버스정류소 1개소 신설(시내버스 노선 분리정차로 정류소 혼잡 해소)

※ 가로변 버스정류소 1개소 신설 사업비: 47,380천원(토목분야)

	B
가로변 버스정류소 신설 구간(장지역 2번출구 앞)

○ 중앙정류소 수목 식재 시행부서 변경

- 중앙정류소에 위치한 수목(회양목) 제거 및 식재 사업을 수목관리부서로 조정(동부도로사업소 도로보수과 → 송파구 공원녹지과)

※ 중앙정류소 수목 식재 사업비: 104,830천원(녹지분야)

□ 재배정 금액 및 재배정처 변경

사업명	당 초 (당해예산)	변 경 (조정금액)	증 감	비 고
송파대로 교차로 소통개선 사업	1,669,925천원	1,725,666천원	증 55,741천원	당해예산 추가배정

<세부 산출내역: 1,725,666천원>

(단위: 천원)

예산과목			배정부서		누계배정액 (A+B)	기 배정액 (A)	금회배정액 (B)	비고
부서,정책,단위	세부사업	통계목
도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계및소통개선, 교통개선분담금사사업(교통사업특별회계)	송파대로 교차로 소통개선사업	시설비 (401-01)	계		1,725,666	1,669,925	55,741
			송파구	도로과	586,232	538,852	47,380	증액
			송파구	공원 녹지과	104,830	-	104,830	증액
			동부도로사업소	도로 보수과	606,411	702,880	-96,469	감액
			동부도로사업소	기전과 (신호등)	304,027	304,027	-
			동부도로사업소	기전과 (표지판)	124,166	124,166	-

□ 조치 계획

○ 설계변경 요구된 사업 내용과 같이 예산을 추가 재배정하여 사업 시행에 만전을 기하고자 함.  끝.