문서번호	도시철도토목부-6686
결재일자	2018.6.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
엄상민		윤방식	06/04 代윤방식
협 조
	주무관			김용선

『서울지하철 9호선 3단계 건설공사』

통합 공정회의 개최 결과 보고(5월)

2018. 6.

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

『서울지하철 9호선3단계 건설공사』
통합 공정회의 개최 결과 보고(2018년 5월)

지하철 9호선3단계 건설공사의 원활한 추진 및 적정 공정관리를 위한 2018년 5월 통합 공정회의 개최 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

○ 일    시 : ‘18. 5. 24.(목) 14:30~16:00

○ 장    소 : 본부 10층 회의실

○ 참 석 자 : 30명

- 본   부  : 도시철도국장, 도철토목부장, 도철건축부장, 도철설비부장, 분야별 담당과장, 업무담당

- 현   장  : 책임감리원 및 현장소장(918~923공구, 시스템)

- 운영기관 : 서울메트로 9호선 운영(주) 개통준비단장

□ 보고내용

○ 공구별 보고 : 회의 자료에 의거 각 공구 책임감리원이 보고

○ 부서별 현안사항 보고 : 담당과장 보고

□ 공정회의 결과

○ 분야별 요구(협조)사항

분 야	협조 요청사항
전분야	□ 종합시험운행 사전점검 시 지적된 사항에 대해 조속히 마무리하여 시설물 검증시험에 차질이 없도록 하시기 바람.
건 축	□ 케노피, E/V 등 공사장 주변 정리정돈 미비로 인한 민원이 잦은 바, 현장 정리정돈 철저히 하시기 바람.
토 목	□ 보도복구 조속히 착수하여 6월 공정률을 최대한 올릴 수 있도록 할 것.
설 비	□ 시설물 검증 시험을 위해 중앙 환기 가동하여 제습요망

○ 본부 요구(협조)사항

<도시철도국장>

- 개통시기에 맞게 상가 운영이 가능할 수 있도록 지금부터 준비를 잘하여 주시기 바람.

- 종합시험운행 관련 사항은 아무리 얘기하여도 지나치지 않는 바, 종합시험운행 사전점검 시 지적된 사항 중 미조치된 사항은 조속히 마무리하여 시설물 검증시험 등 종합시험운행에 철저를 기하시기 바람.

- 보도 복구와 관련하여 관리청과 잘 협의하여 추진하시고, 보도 10계명 등 공사관리도 최선을 다하여 주시기 바람.

- 마무리 공사와 관련하여 공정관리도 중요하지만 무엇보다 안전관리가 중요하므로 잘 챙겨주시기 바라며, 이제 우기가 곧 다가옴을 감안하여 강우 시 문제가 발생하지 않도록 관리하시기 바람.

- 건축, 기계, 전기공사 등 마무리 공사가 진행 중인 바 공정관리 강화계획에 따라 공정계획을 제출받아 관리에 철저를 기해 주시기 바라며, PMIS 공정도 매일 확인하여 주시기 바람. 또한 공사와 관련하여 협력업체에 문제가 발생하지 않도록 관리하여 주시기 바람.

<도시철도토목부장>

- 920공구 하수BOX 설치공사에 노고가 많으셨으며, 각 공구별로 하수관로 미복구가 있으므로 조속히 조치하시기 바람

- 사전점검 지적사항 조치가 14%밖에 안되므로 조속히 조치하고 각 분야별로 보고하여 주시기 바람.

- 보도복구 공사를 조속히 착수하여 6월 공정을 최대한 올릴수 있도록 할 것.

- 신호등 부분 규제심의 조속히 마무리 할 것(경찰청 협의 등)

<도시철도건축부장>

- 케노피, E/V 등 공사장 주변 정리정돈 미비로 인한 민원이 잦은 바, 현장 정리정돈 철저히 할 것.

<도시철도설비부장>

- 사전점검 지적사항에 대해 교통안전공단 점검 전 이상없도록 조치 할 것.

- 시설물 검증 시험을 위해 중앙 환기 가동하여 제습요망

□ 행정사항

○ 금회 공정회의시 협조요청 및 요구사항은 각 분야(공구)별로 조치 결과를 보고 (제출).

붙임 : 통합공정회의 회의자료 1부.  끝.