문서번호	청소년정책과-11385
결재일자	2018.6.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	청소년시설팀장	청소년정책과장
정한수	최희곤	06/27 이창석

-시립청소년수련관(광진,성동)-

기능보강사업 변경계획 검토보고

2018. 6

기능보강사업 변경계획 검토 보고

시립청소년수련관(광진, 성동)의 시설 기능보강사업에 대한 사업변경 계획이 있어 이를 검토하고 보고함.

□ 기능보강사업 변경계획 및 사유

○ 시립광진청소년수련관

(단위 :　천원)

연번	세부사업명	예산액		사유
		변경 전	변경 후
합계		*******	*******
1	자동제어시스템교체	******	******	******
2	농구장 바닥재 교체	******	******	******
3	암벽등반장 리모델링	*******	*	***************************************
4	암벽등반장 철거 및 바닥 마감공사	*	******	*******************************************************************
5	수련관 냉난방공사	*	******	************************************* *********************************************

○ 시립성동청소년수련관

(단위 :　천원)

연번	세부사업명	예산액		사유
		변경 전	변경 후
합계		*******	*******
1	환경개선공사	*******	*******	*************************** *****************************
2	체육관 보강공사	*******
3	석면해체공사	*	*****	********************************************

□ 검토 결과

○ 변경 후 사업은 예산 교부 전 기능보강사업 현장점검 시 자문위원 검토 적정 사업으로 안전사고 예방 및 민원발생 해소를 위해 노후화된 시설을 보수하는 공사이므로 사업계획 변경을 승인함

□ 향후 계획

○ ’18.7.                       사업계획변경 승인 통보(市→수련관)

○ ’18.7~10.                  공사발주 및 계약체결(수련관)

○ ’18.11.~12.                공사착공 및 준공(수련관)

붙임 : 기능보강사업계획 변경신청서 관련 내역 각 1부. 끝.