문서번호	도로시설과-8512
결재일자	2018.8.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	터널복개팀장	도로시설과장
이기승	김두석	08/07 代오재영

예산 재배정 검토 보고

- 난곡터널 보수공사-

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 8.

안전총괄본부

도로시설과

예산 재배정 검토 보고

- 난곡터널 보수공사 -

2018년 도로시설물 유지관리사업「난곡터널 보행자 환경개선공사」추진을 위한 도로사업소 예산 재배정 검토 보고

Ⅰ		근거 및 개요

□ 추진근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제25조

- 시설물의 안전 및 유지관리 예산 확보

○ 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침 (국토해양부)

⇒ 터널내 보차도 분리벽 설치 계획수립(도로시설과, 2003)

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 난곡터널 보수공사

○ 위    치 : 관악구 신림동 산197 ~ 신림동 1623

○ 사업내용 : 방음벽 설치 376m

○ 예 산 액 : 600,000천원

○ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12. (실시설계:‘18.3 ~ 7월)

	《난곡터널》
◇ 위치 / 노선 : 관악구 신림동 산197~ 신림동 1623 / 문성골길 ◇ 준공일 / 규모 : ‘92.06 / 연장 360m, 폭 20m ◇ 종별 / 상태등급 / 구조형식 / 유지관리기관 : 2종 / B / AR / 남부도로사업소

Ⅱ		예산 재배정 검토

□ 금회 재배정 요청

○ 난곡터널 방음벽 설치 공사비 : 948,638천원

- 도 급 비 : 494,291천원

- 관 급 비 : 280,873천원

- 이 전 비 : 173,474천원 (폐기물, 교통처리비등)

※ 계약심사 완료 : 절감액 4,447천원 (계약심사과-11850, 2018. 7. 16)

□ 재배정 검토

○ 요청 사업 추진의 필요성 : 필요

- 방음벽 설치로 이용시민에게 쾌적한 보행환경 제공

○ 요청 사업비의 적정성 : 적정

- 설계내역 및 주요자재 단가 확인

○ 예산 재배정(안)                                    (단위 : 천원)

예산과목	예산현액	기 재배정액	금회 재배정액	재배정 잔액	재배정처
계	1,000,000	46,915	948,638	4,447	- 남부도로사업소 시설보수과

Ⅲ		추진계획

□ 추진일정

○ 2018. 08. : 예산 재배정

○ 2018. 08. : 공사 발주

○ 2018. 09. ~ 2018. 12. : 착공 및 공사 시행

별   첨 : 도로사업소 요청서류 일체.    끝