문서번호	기전과-7331
결재일자	2018.8.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
윤석주		서수일	08/08 이학구
협조

「증산지하차도」조명등 개선공사

시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 8.

서부도로사업소

(기전과)

「증산 지하차도」

조명등 개선공사 시행계획

증산지하차도의 노후 조명등을 LED등으로 개량하여 조도를 향상하여

시민들의 안전하고 쾌적한 통행으로 생명과 재산을 보호코자 함.

1		추진근거

☐ 도로시설 조명분야 효율화 계획 (도로시설과-15428호,’14.9.1.)

☐ 2018년 도로기전시설물 세부사업 추진계획(기전과-496호,’18.1.16.)

2		예산현황

☐ 예산현황

(단위 : 천원)

단위 사업명	예 산 액	재 배 정 액		배정잔액	비고
		기배정액	금회배정액
도로시설물 노후조명설비개선	269,716	0	269,716	0

☐ 예산과목

○ 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물관리, 도로시설물 노후 조명설비

개선, 시설비(401-01)

3		사업개요

☐ 사 업 명: 증산지하차도 조명등 개선공사

☐ 위    치: 은평구 증산동 233 ∼ 마포구 성산동 488

☐ 기    간: 2018. 8. ~ 2018. 12. (예정)

☐ 예 산 액: 269,716천원

(단위: 천원)

구 분	합 계	공 사 비		비고
		도급비	관급비 (LED조명)
금 액	269,716	169,512	100,204

※ 관급비: 조달수수료 포함 금액

☐ 개선규모

구 분	개 선 전		개 선 후		비고
	NA 250W	FL 32W × 1등	LED 50W	LED100W
수 량	662	192	80	150
합 계	854		230

☐ 주요내용

○ 증산지하차도 기존 지하차도 등기구 철거 및 LED조명 설치

○ 전선관 및 전력케이블 등 일부 부대시설 공사

4		추진계획

☐ 전기공사 시행

구 분	추 진 방 법	추 진 근 거	비고
공사발주	재무과에 계약의뢰	서울특별시 재무회계규칙 제3조 (추정가격 5천만원 이상)
입찰방법	제한경쟁입찰 (지역제한)	지방계약법 시행령 제20조 (5억원 미만)

☐ 관급자재 구매

○ 구매기준: 서울시 터널등 LED표준 규격 (서울시 고시 제2016-230호)

- LED 모듈

정격전력	정격전류	초기광속	연색지수	색온도	광효율	최소광속
25W이하	700mA	95%이상	75이상	4500K~ 5000K	95lm/w	2750lm이상

- LED 전원용 컨버터

형식	출력방식	정격출력전류	정격전력(W)	역율
기구 내장형 기구 독립형	정전류방식	700mA	50,100,150,200	0.95이상

○ LED터널 등기구 구매

- 구매방법: 조달구매 (제3자단가 구매)

- 소요예산

구 분	규격	수량(개)	평균단가(원)	금액(원)
LED등기구	50W	80	372,800	29,824,000
LED등기구	100W	150	465,600	69,840,000
소 계		230		99,664,000
조달수수료	0.54%			540,000
합 계				100,204,000

5		향후계획

☐ 계약심사 의뢰 및 예산 재배정 요청: 2018. 8.

☐ 공사 및 관급자재 발주: 2018. 8.

☐ 공사착공 및 준공 : 2018. 9. ~ 2018. 12.  끝.