투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 체결 보고(수생식물원 리모델링사업)

1. 여의도공원관리사무소-2743(2018. 10. 29.)호와 관련됩니다.

2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 변경계약이 체결되었음을 보고합니다.

가. 건    명 : 선유도공원 수생식물원 리모델링사업

나. 계 약 자 : 방림에버그린 주식회사 대표 이미경

다. 계약금액 : 금80,000,000원(금팔천만원)

라. 공사기간 : 2018. 9. 3.~ 2018. 10. 31.

마. 변경내용 : 준공기한 변경

○ 당초 : 2018. 10. 31. → 변경 : 2018. 11. 7.

붙임  공사계약서류 각 1부.  끝.

★주무관	김호영		주무관	김선희		공원운영과장	배효성		서부공원녹지사업소장	10/30 오진완
협조자
시행	공원운영과-13939	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	300-5512	/전송	300-5527	/	sky500611@seoul.go.kr	/	부분공개(6)