문서번호	한양도성도감-10119
결재일자	2018.10.30.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
★주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
이은경		곽동진	10/30 진용득
협조

「2018년 한양도성 기존 안내판 정비 및 신규 안내판 제작·설치」 계약 변경 계획(수량·품목 변경, 금액 증가, 기간 연장)

2018. 10.

문 화 본 부

(한양도성도감)

「2018년 한양도성 기존 안내판 정비 및 신규 안내판 제작 설치」 계약 변경 계획(수량·품목 변경, 금액 증가, 기간 연장)

정비대상 한양도성 기존 안내판의 현장확인 결과, 훼손 등으로 재사용 할 수 없는 안내판의 수량 증가 및 물품 교체 사항이 있어 계약변경(수량·품목 변경, 금액 증가, 기간 연장) 진행하고자 함

Ⅰ		물품제조·구매 개요

❍ 계 약 명 : 한양도성 기존 안내판 정비 및 신규 안내판 제작, 설치

❍ 계약기간 : ’18.9.7.~11.6.

❍ 계약상대자 : ㈜김스애드(대표 ***)

❍ 계약금액 : ***********

Ⅱ		변경내용

(※계약금액 ************ 계약기간 연장 10일)

❍ 변경사유

- 수량 증가 : 훼손·분리 안내판이 증가하여 재설치 제작수량 증가(교체수량 감소)

- 품목 교체 : 부식·탈락 등 훼손이 잦아 안전사고 우려되는 품목의 교체(방향안내판 A, B→E) 및 지도를 유지관리 용이한 품목으로 변경(판교체→시트교체)

- 기간 연장 : 재설치 제작수량 증가 및 품목 변경에 따라 기간 연장 필요

- 금액 증가 : 수량 및 품목 변경사항 반영하여 금액 증가 필요

❍ 계약금액 및 계약기간 변경내용

구 분	당 초	변경 후	비 고
계약금액	***********	***********	***********
계약기간	2018.9.7.~11.6.	2018.9.7.~11.16.	연장 10일

❍ 수량·품목 변경내용

- 위험경고안내판 신규 제작·설치 : 8개(변경 없음)

⦁ 혜화동 전시안내센터 주변 성벽(위험경고안내판A) : 방향안내판A 규격 3개

⦁ 다산성곽길 주변 성벽(위험경고안내판B) : 5개

- 기존 안내판 정비 제작·설치 : 64개(재설치 제작수량 25개 증가, 품목변경)

물품내용	당초 수량(개)	변경 후 수량(개)	비고
합 계	53 (재설치 29, 교체 등 24))	64 (재설치 54, 교체 등 10)
방향안내판A(제작설치)	18	-	방향안내판E로 교체
방향안내판A(부재교체)	3	-	재사용 불가, 방향안내판E로 교체
방향안내판B(부재교체)	1	-
방향안내판D(판교체)	2	1	교체수량 감소
방향안내판E(제작설치)	3	46	증43개
방향안내판E(시트교체)	11	3	교체수량 감소
종합안내판(지도-판교체)	6	-	품목제외
종합안내판(지도-시트교체)	-	6	품목추가
종합안내판(설치)	1	-	품목제외
위험경고안내판A(제작설치)	3	3	방향안내판A 규격
위험경고안내판B(제작설치)	5	5	-

Ⅲ		행정사항

❍ 계약내용 변경(수량·품목 변경, 금액 증가, 기간 연장)사항 반영하여 변경계약 의뢰(재무과)

❍ 소요예산 : ******************

- 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존·정비, 한양도성 안내판 개선 및 확충, 시설비

붙임  1. 변경 설계서 1부.

2. 추가품목 비교 견적서 3부.  끝.