문서번호	기전과-4646
결재일자	2018.10.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
유정하		10/31 代문준호
협 조
	주무관		이군재

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

변경승인 요청 검토보고(금호제15구역)

2018. 10.

성동도로사업소

(기  전  과)

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

변경승인 요청 검토보고(금호제15구역)

교통안전시설물 원인자 부담공사 변경승인 요청이 있어 아래와 같이 검토보고 드림.

□ 관련근거

○ 금호 15재조 2018-121(2018.8.29.)

- 교통안전시설물 원인자부담 공사(신호) 연장요청의 건

○ 협우지여 제 18-457(2018.8.30.)

- 금호제15구역 주변 교통안전시설물(신호) 원인자 부담공사 준공기한 연기요청

○ 금호 15재조 2018-163(2018.10.25.)

- 교통안전시설물 원인자부담 공사(신호) 연장요청의 건

○ 협우지여 제 18-497(2018.10.31.)

- 금호제15구역 주변 교통안전시설물(신호) 원인자 부담공사 준공기한 연기요청

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 교통안전시설물 원인자 부담공사(금호제15구역)

○ 공사내용 : 교통신호기 설치공사 1식

○ 공사구간 : 성동구 금호동1가 558-1(금호고등학교 앞)

○ 공사기간 : 승인일로부터 ~ 2018. 8. 31.

○ 공사참여자

원 인 자	공사 참여자			비 고
	설계사	감리사	시공사
금호제15구역주택재개발정비사업조합	㈜건영이앤씨	㈜협우지여 엔지니어링	미래월드안전㈜

□ 변경승인 요청 내용

○ 변경내용

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
준공기한 연기	승인일로부터 ~ 2018. 8. 31.	승인일로부터 ~ 2018. 12. 31.

○ 변경사유 : 하절기 잦은 우천 및 선행 공정(토목) 지연

□ 검토결과

○ 현장여건 및 변경요청 사유가 타당하여 변경승인 하고자 함.

붙임  1. 관련 공문 및 감리원 검토의견서(2018.8.30.) 각1부

2. 관련 공문 및 감리원 검토의견서(2018.10.30.) 각1부.  끝.