문서번호	기전과-4647
결재일자	2018.10.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
유정하		10/31 代문준호
협 조
	주무관		이군재

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

변경승인 요청 검토보고(성수동 공동주택)

2018. 10.

성동도로사업소

(기  전  과)

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

변경승인 요청 검토보고(성수동 공동주택)

교통안전시설물 원인자 부담공사 변경승인 요청이 있어 아래와 같이 검토보고 드림.

□ 관련근거

○ 두산중 EPC)서울숲18-117(2018.10.24.)

- 교통안전시설물 원인자부담공사 공사기간 연장 요청의 건

○ 협우지여 제 18-500(2018.10.30.)

- 성수동 서울숲 공동주택(트리마제) 교통안전시설물(신호)공사 준공기한 연기요청

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 교통안전시설물 원인자 부담공사(성수동 공동주택)

○ 공사내용 : 교통신호기 및 표지 설치공사 1식

○ 공사구간 : 성수동 서울숲 공동주택 하수관 개량공사 주변

○ 공사기간 : 승인일로부터 ~ 2018. 9. 30.

○ 공사참여자

원 인 자	공사 참여자			비 고
	설계사	감리사	시공사
두산중공업 (서울숲 공동주택 신축공사)	㈜영호이엔씨	㈜협우지여 엔지니어링	미래월드안전㈜

□ 변경승인 요청 내용

○ 변경내용

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
준공기한 연기	승인일로부터 ~ 2018. 9. 30.	승인일로부텅 ~ 2018. 12. 31.

○ 변경사유 : 추가 규제심의로 인한 공사가간 연장

□ 검토결과

○ 현장여건 및 변경요청 사유가 타당하여 변경승인 하고자 함.

붙  임 : 관련 공문 및 감리원 검토의견서 각1부.  끝.