투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자 부담공사 변경 승인(금호파크힐스)

1. 금호 15재조 2018-164호(2018.10.25.) 및 협우지여 제 18-498(2018.10.30.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 교통안전시설물 원인자 부담공사 변경 승인 하오니『교통안전시설 설치공사 원인자 등 준수사항』을 지켜 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 변경승인 내용

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
준공기한 연기	승인일로부터 ~ 2018. 10. 31.	승인일로부텅 ~ 2018. 12. 31.

나. 변경사유 : 선행공정(토목) 지연

붙임  원인자 준수사항 1부.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	금호제15구역주택재개발정비조합장,(주)협우지여엔지니어링 대표이사
주무관	유정하		기전과장	10/31 代문준호
협조자
시행	기전과-4648	(		)	접수		(		)
우	04807	성동구 자동차시장길 41(용답동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송	02-2210-1536	/		/	부분공개(5)