투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자 부담공사 변경 승인(성수동 공동주택)

1. 두산중 EPC)서울숲18-117(2018.10.24.) 및 협우지여 제 18-500(2018.10.30.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 교통안전시설물 원인자 부담공사 변경 승인 하오니『교통안전시설 설치공사 원인자 등 준수사항』을 지켜 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 변경승인 내용

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
준공기한 연기	승인일로부터 ~ 2018. 9. 30.	승인일로부터 ~ 2018. 12. 31.

나. 변경사유 : 추가 규제심의로 인한 공사기간 연장

붙임  원인자 준수사항 1부.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	서울숲 공동주택 신축공사 현장대리인,(주)협우지여엔지니어링 대표이사
주무관	유정하		기전과장	10/31 代문준호
협조자
시행	기전과-4651	(		)	접수		(		)
우	04807	성동구 자동차시장길 41(용답동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송	02-2210-1536	/		/	부분공개(5)