기성(2회)부분검사(감독)조서<2018년 노면하부 공동탐사용역(1단계)>

문서번호	도로관리과-16259
수 신 자	재무과장
접수번호

결재	주무관	도로굴착관리팀장	도로관리과장
	정호운	代박세준	10/31 박문희

공사명	2018년 노면하부 공동탐사용역(1단계)
계약자	셀파이엔씨㈜ 대표이사 곽정하외 1개사
계약금액	일금 일십이억사천사백구십구만팔천원(금1,244,998,000원)				기성부분 준공금액		일금 일억팔천사백팔십만원(금184,800,000원)
계약일자	2018년 6월 5일				착공일자		2018년 6월 5일
준공기한	2018년 12월 15일				부분준공 일 자		2018년 10월 30일
준공검사일자	2018년 10월 31일				참고사항		전회기성금액 : 717,200,000원 금회기성금액 : 184,800,000원 누계기성금액 : 902,000,000원
건설산업지식정보시스템(Kiscon) 확인 사항				해당없음
위 공사(용역)에 대한 감독 및 기성준공검사를 마쳤는 바 공사 설계서와 도면 및 규격서(과업지시서) 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었기에 본 조서를 제출함.
2018년 10월 31일
현장감독공무원		도로관리과	과	지방시설주사보		직		성명	정호운
검 사 자		도로관리과	과	지방시설사무관		직		성명	김근용		代박세준
검 사 자		도로관리과	과	지방시설주사보		직		성명	강다은		강다은
서울특별시(분임)재무관 귀하

기성부분 검사조서(제2회)

1. 용 역 명 : 2018년 노면하부 공동탐사용역(1단계)

2. 계 약 자 : 셀파이엔씨㈜ 대표이사 곽정하외 1개사

3. 계약금액 : 일금일십이억사천사백구십구만팔천원(금1,244,998,000원)

4. 기성금액   (※ 추진기간 : 2018.9.14. ~ 2018.10.30.)

○ 전회까지기성  : 금 717,200,000원 (57.6%)

○ 금회기성(2회): 금 184,800,000원 (14.8%)

○ 누계기성      : 금 902,000,000원 (잔액 342,998,000원)

5. 세부내역

(단위 : 원)

공 종	규 격	단위	계 약 금 액		전회까지 기성금액		금회 기성금액		잔여금액
			수량	금 액	수량	금 액	수량	금 액
1. 2017년 노면하부 공동탐사용역(1단계)
1) 직접인건비
1차탐사	차량형 노면하부 탐사GPR	km	950	34,246,550	592	21,341,008	150	5,407,350	7,498,192
1차탐사 GPR자료분석	해석 및 자료처리	km	950	377,479,650	592	235,229,424	150	59,602,050	82,648,176
보고서작성		km	950	14,756,350	-	0	-	0	14,756,350
2) 직접경비
성과품인쇄, data백업		식	1	2,226,770	-	0	-	0	2,226,770
3) 제 경 비	직접인건비의110%	식	1	451,973,995	1	271,536,073	1	68,801,370	111,636,552
4) 기 술 료	(직접인건비+제경비)×20%	식	1	172,571,889	1	103,677,410	1	26,269,614	42,624,865
5) 2차 조사비	천공 및 내시경조사	공	342	51,705,270	137	20,712,345	55	8,315,175	22,677,750
6) 보도구간 GPR탐사 방안 연구		식	1	12,463,200	-	0	-	0	12,463,200
7) GPR 단면에 의한 공동규모 정량적 분석연구		식	1	15,000,000	-	0	-	0	15,000,000
공급가액				1,131,816,364		652,000,000		168,000,000	311,816,364
8) 부가가치세				113,181,636		65,200,000		16,800,000	31,181,636
합 계				1,244,998,000		717,200,000		184,800,000	342,998,000

붙임 1. 기성부분준공(제2회) 신고서 및 기성내역서 등 관련서류 각 1부.

2. 준공사진대지 1부.

3. 검사원지정요구서 1부.  끝.

	도로관리과장