투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(부진공정 만회를 위한 건설사업관리기술자 연장근무 실정보고 관련사항 승인 통보)

1.업무지시현장 : 신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 현대건설(주), 신월 빗

물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 현대건설 주식회사, 신월 빗물

저류배수시설 등 방재시설 확충공사 현대엔지니어링 주식회사, 신월

빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 주식회사 수성엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2018-10-31 16:10:11

3.지 시 내 용

가. 수성신월 제18-611호(2018.10.29.)호와 관련입니다.

나. 부진공정 만회를 위한 B/P장 운영과 돌관공사 추진에 따른 건설사업관리기술자           연장근무(조기출근)에 대한 대가지급 적정성 검토 실정보고 사항에 대하여 승인         통보 하오니

다. 근무시간 조정으로 안전 및 품질확보에 차질이 발생하지 않도록 변경근무에              철저를 기하여 주시기 바라며, 아울러, 근로기준법에 따른 주당 노동시간도             병행 준수하여 주시기 바랍니다.  끝.

본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							이병환			치수시설과장					조성만					방재시설부장					11/01 이임섭
협조자				주무관						송영배
시행			방재시설부-13893									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(프리미어플레이스빌딩 14층) 도시기반시설본부 방재시설부															/
전화		02-3708-8773						/전송			02-3708-8756					/	bhl923@seoul.go.kr												/	대시민공개