문서번호	시설보수과-6030
결재일자	2018.11.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
나필수		윤승범	11/01 이성재
협조

준공기한 연기 보고 (중랑물재생센터 슬러지 건조시설 전기공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

준공기한 연기 보고

(중랑물재생센터 슬러지 건조시설 전기공사)

『중랑물재생센터 슬러지 건조시설 전기공사』와 관련하여 건설사업관리단의 준공기한 연장요청이 있어 아래와 같이 보고함니다.

[관련근거 중랑슬관 2018-445(2018.10.31.)]

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 중랑물재생센터 슬러지 건조시설 전기공사

○ 공사개요 : 배관·배선 1식/ 수배전반 설치·철거 1식/ 조명등기구 설치 등

○ 계 약 자 : 영웅이엔씨외 2개사

○ 공사금액(1차) : 633,402,000원

○ 공사기간(1차) : ’17.12.11.~’18.11.30.(총차: ’17.12.11.~’19.03.05.)

□ 준공기한 연기사유 및 기간

○ 연기사유

- 선행공정 지연으로 인하여 1차공사 공기부족으로 연기필요

○ 준공기한 연기 : 당초 2018. 11. 30

변경 2018. 12. 31

□ 조치의견

○ 상기 사항의 1차 계약분에 대한 준공기한연장 변경계약을 추진 하고자 합니다.

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 연장요청 공문 1부.  끝.