문서번호	도로보수과-9922
결재일자	2018.11.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
김경욱		代정회곤	11/01 김용제
협조

2018년 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사(연간단가)

제 5차 작업계획 보고

2018. 11.

강서도로사업소

도로보수과

제 5차 작업계획 보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2018년 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2018. 3. 13. ~ 2018. 12. 15.

○ 시 공 사 : 이에스피건설 대표 강 상 수

○ 도 급 비 : 금269,043,410원

□ 보고내용

○ 응답소 민원접수 사항 및 도로부속물 유지관리대상 보수

○ 보수대상 및 물량

연번	위 치	작 업 내 용	규격 및 지시물량	작업조건		비고
				주간	야간
1	공항대로, 발산역~양화교	시선유도봉 정비	50개	√
2	남부순환로, 개봉동 403-19 앞	방호울타리 단부 정비	1개	√
3	노들로, 당산중학교 앞	방호울타리 레일 정비	1경간	√
4	노들로, 양화대교 남단 램프	시선유도봉 설치	5개	√		민원
5	노들로, 양화대교 남단 램프	콘크리트 구조물 정비	1개	√		민원
6	목동서로, 양평교 서단	방호울타리 단부 정비	1개	√
7	방화대로, 공학중학교 앞	시선유도봉 설치	30개	√		경찰요청
8	버드나루로 155 앞	무단횡단금지시설 정비	18경간	√		민원
9	남부순환로, 공수부대 정문 앞	시선유도봉 설치	51개	√		포장후속
10	남부순환로105길 118-4 앞	시선유도봉 설치	20개	√		경찰요청
11	목동동로, 목동 11단지 앞	빗물받이 정비	1개소	√		민원
12	목동서로, 목동서로2길 교차로	시선유도봉 설치	20개	√		민원
13	선유로, 양화대교 남단	시선유도봉 설치	116개	√		포장후속
14	양평로, 당산역 앞	무단횡단금지시설 정비	5경간	√		민원
15	오목로, 오목지하차도 상부	시선유도봉 정비	20개	√		포장후속

※추후 현장여건에 따라 지시물량의 경미한 변경 가능

□ 조치계획

○ 위 보수대상 시설물을 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수(연간단가) 업체에 작업지시하여 보수하고자하며 추후 설계변경 시 정산처리

- 건    명 : 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사 제4차 작업지시

- 작업위치 : 공항대로(발산역~양화교) 등

- 작업기간 : 2018. 11. 01. ~ 2018. 11. 30.

- 공종 및 물량 :“별첨 작업지시내역”

- 소요금액 : 약 12,909천원 (실제 시공물량에 따라 추후 정산)

○ 도급비 집행 현황                                                (단위 : 원)

도 급 비 (A)	기 집행 공사비(B)			금회사용(5차) (C)	비고(잔액) (A)-[(B)+(C)]
	기성(1,2차 작업)	3,4차 작업(예상)	소 계
269,043,410	198,572,000	118,778,000	317,350,000	12,909,387	-61,215,977

※기 계약 도급비를 초과하는 공사비는 낙찰차액, 잔여 관급비 등 가용 예산을 활용하여 설계변경 시정산

※도급비 가용 예산

가용 예산 종류	예산액(원)	비고
낙찰차액	38,516,590
잔여 관급비	10,170,570
무단횡단금지시설 정비 예산	20,000,000	교통사망사고 줄이기 사업
합계	68,687,160

붙임 1. 작업지시서 및 위치도 1부.

2. 개략공사비 내역서 1부.  끝.