문서번호	시설보수과-2467
결재일자	2018.11.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
김승조	김재봉	김일운		11/01 代윤석경
협 조

-2018년 불광천 차집관거 보수공사(사각) 시공감리용역-

설계변경(1회) 시행계획 보고

2018. 11.

시설보수과

- 2018년 불광천 차집관거 보수공사(사각) 시공감리용역-

설계변경(1회) 시행계획 보고

□ 우리 센터에서 시행중인 2018년 불광천 차집관거 보수공사(사각) 시공감리용역의 설계변경(1회) 사항에 대한 시행계획 보고임.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2018년 불광천 차집관거 보수공사(사각) 시공감리 용역

○ 공사기간 : 2018. 08. 07 ~ 2018. 11. 04

○ 용 역 비 :  30,908,000원

○ 용 역 사 : ㈜건양엔지니어링 대표이사 이승헌

○ 공사내용

- 공사명 : 2018년 불광천 차집관거 보수공사(사각)

- 공사위치 : 서대문구 북가좌동 342-14~347-1

- 공사기간 : 2018.07.13.~2018.12.23

- 공사개용 : 단변복구 1,548㎡, L=344m

- 도급업체 : 용일토건(주) 대표이사 박준상

□ 시공감리 설계변경 관련 보고내용

① 당초 용역기간이 사업 기간 보다 부족하게 책정

- 불광천 차집관거 보수공사(사각) 시공감리 용역이 불광천 차집관거 보수공사(사각)보다 기간이 적게 산정되어 용역 계약 체결 하였음

- 사유 : 불광천 차집관거 보수공사(사각)의 작업 물량등을(단변복구 1,548㎡, L=344m) 감안하여 11월 4일 이내 공사 준공 목표하여 불광천 차집관거 보수공사(사각) 시공감리 용역의 용역기간을 최대한 줄여 당초 발주 하였음.

② 불광천 차집관거 보수공사(사각)의 총사업비 300백만원 증액에 따라(시설보수과-2346,2018.10.11.) 당초 용역기간(2018.08.07.~2018.11.04.)내에 공사 준공이 어려운 실정임.

□ 주요변경사항

○ 용 역 기 간

- 당초 : 2018.08.07. ~ 2018. 11. 04

- 변경 : 2018.08.07. ~ 2018. 12. 23

○ 용 역 금 액

- 당초 : 30,908,000원

- 변경 : 46,300,000원

○ 용 역 사 : ㈜건양엔지니어링

□ 예산조치 계획

○ 불광천 차집관거 보수공사(사각)의 감리 증액비 15,392천원은  불광천 차집관거 보수공사(사각)의 증액비 300,000천원(시설보수과-2346,2018.10.11.) 내에서 반영토록 조치코자 함.

별첨 : 1. 변경사유서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 공통분야 잔액 활용계획 1부.  끝.