문서번호	도시철도설비부-10226
결재일자	2018.11.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	설비공사과장		도시철도설비부장
임헌호	황영일		11/02 구자훈
협 조

시민안전 확보를 위한 9호선 3단계

승강설비 풀부하시험 결과 보고

2018. 10.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

시민안전 확보를 위한 9호선 3단계 구간

승 강 설 비  풀 부 하 시 험  결 과 보 고

정거장에 설치된 에스컬레이터에 대하여 정상가동 여부 및 성능확인을 통해 시민안전을 확보코자 실시한 풀부하 시험결과를 보고 함.

Ⅰ. 시험개요

○ 시험일자 : ‘18. 10. 25(목)~26(금) 14:00 ~ 17:00

○ 검사대상 : 에스컬레이터 총 97대

○ 참 석 자 : 총 220명

- 본부 31명, 9호선운영(주) 3명, 감리단․시공사 16명, 제조사 160명

- 기술인력 6명, 안전관리요원 4명

○ 시험방법 및 판정기준

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준
부하시험	인솔자 안내에 따라 스텝당 2인씩 탑승하여 대당 2회 이상 운행으로 원활한 운행 지속여부 확인	풀부하 운행중 정지없이 정상가동 유지여부

○ 안전관리조치

- 시험동선 계획 및 시험구간 위해요인 사전제거 조치

- 참석자에 대한 시험계획 설명 및 사전 안전교육 실시

- 탑승시 안전한 탑승요령 및 멈춤, 역주행, 끼임 등 사고예방

- 시험대상 에스컬레이터 주변에 안전관리자 상주배치 및 안전관리

- 시험중 고장 등에 대비한 승강기 기술인력 배치 및 상황발생시 조치 등

Ⅱ. 시험결과

○ 전체적으로 작동상태가 양호한 것으로 나타났으나 937정거장의 1대가 운행중 안전센서 작동(정상)으로 멈춰 센서감도 재조정 등 현장조치 완료 후 정상 가동됨

- 부하율 재조정(평시 70%⇒ 풀부하 100%), 부품별 간격조정 및 재검사결과 가동상태 양호 확인

※ 멈춤시 역주행방지장치 모두 정상작동

○ 정거장별 시험결과

- 에스컬레이터 총 97대중 97대 시험실시

역 명	시험수량	시험결과	비 고
삼 전 (931)	16	양 호	▪ 정상 가동됨
석촌고분 (932)	6	양 호	▪ 정상 가동됨
석촌 (933)	25	양 호	▪ 정상 가동됨
송파나루(934)	6	양 호	▪ 정상 가동됨
한성백제(935)	12	양 호	▪ 정상 가동됨
올림픽공원 (936)	14	양 호	▪ 정상 가동됨
둔촌오륜(937)	8	양 호	▪ 1번출입구 #1번 에스컬레이터 비상정지 현장조치(센서감도 조정) 완료 후 정상 가동됨
중앙보훈병원 (938)	10	양 호	▪ 정상 가동됨

Ⅲ. 향후계획

○ ‘18.10.30~11.16: 개통대비 발판 및 내부청소

○ 현재 ~ 개통시: 장비안정화를 위한 시운전 및 점검․조정 등

붙임 : 풀부하시험 현황사진 1부.  끝.