문서번호	토목부-18597
결재일자	2018.11.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
황윤기		장종환	11/02 김영수
협조

중앙버스차로 소성변형구간 긴급보수 검토보고(천호대로 확장공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

교량건설과

중앙버스전용차로 소성변형 긴급보수 검토보고

(천호대로 확장공사)

우리부에서 시행중인 「천호대로(광나루역) 확장공사」의 중앙버스전용차로 소성변형구간 긴급보수에 대한 실정보고가 있어 이에 대한 검토 보고임.

※ 151,739천원 증액(도급 38,674, 폐기물 24,256, 관급 88,809)

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 천호대로(광나루역) 확장공사

○ 위    치 : 광진구 구의동 58-15 ~ 광장동 388-10(아차산역~광나루역)

○ 규    모 : 폭 6 → 10차로, 연장 900m(지하차도 580m 포함)

중앙버스전용차로 L=2,600m, 정거장5개소

상징조형물 설치(높이 23.3m, 승강기 2대)

○ 사업기간 : 2010.10. ~ 2018.12.

○ 총사업비 : 106,001백만원 ('18년 예산 12,140백만원)

○ 감 리 사 : ㈜수성엔지니어링

○ 시 공 사 : 해동건설㈜ 외 1개사

○ 공 정 률 : 97%

Ⅱ		관련근거

○ 천호수 제2018-501호(2018.10.10.)

- 실정보고(중앙버스전용차로 소성변형구간 긴급보수) 승인요청

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

○ 실정보고 사유

- 중앙버스전용차로 설치구간 중 버스정차구간(교차로 및 버스정차구간, 횡단보도구간)등이 금년 폭염으로 인해 공용중인 중앙버스전용차로(버스정차구간)에 소성변형이 발생되어 시민의 안전 및 운전자의 안전을 확보하기 위하여 긴급 보수코자 실정보고함

○ 소성변형 발생 현황

구 분		시공 포장단면	소성변형 발생현황
중앙버스전용 차로 버스정차구간	아차산 사거리	기존포장면 상단에 덧씌우기 5cm추가	러팅 : 3cm ∼ 5cm
	광장사거리	6cm 절삭 후 6cm 덧씌우기 포장	러팅 : 3cm ∼ 5cm
	중곡동입구삼거리	5cm 절삭 후 5cm 덧씌우기 포장	러팅 : 5cm ∼ 8cm

중곡동 입구 삼거리 횡단보도	아차산 사거리 중앙버스정류장

○ 아스콘 소성 변형 검토

구 분	변 경 내 용	비 고
버스 정차 구간 보수	○중앙버스전용차로 버스정차구간(정차, 출발, 감속)이 금년 폭염기간에 버스집중하중으로 인한 소성변형(러팅)발생 ○2018년 7월~8월 폭염(35°이상) 현황 - 18년 7월→9일 폭염지속, 18년 8월→13일 폭염지속 - 최고기온 39.6° - 폭염기간 아스콘 표면온도 : 64°~68° ○버스정차구간중 기존포장에 덧씌우기 포장을 실시한 구간 소성변형(러팅) 발생 ○버스정차구간중 폭염에 의하여 러팅이 발생한 구간에 대하여 천호대로 중앙버스전용차로 전구간 보수를 실시한 성동도 로사업소의 보수공법과 동일 아스콘포장 공법으로 보수 실시

○ 아스콘 포장구간 보수방법 검토

구분	시 공	보 수
개 요 도
아스콘 포장	· 기층 : 기존포장단면 유지 · 표층 : 절삭후 덧씌우기(T=5cm)	· 기층 : 절삭후 재포장(T=20cm) · 표층 : 절삭후 재포장(T=5cm)

※ 천호대로 확장공사 중앙버스전용차로 전․후구간(성동도로사업소관리구간)도 폭염에 의한 소성변형이 발생하여 사업소에서 동일 방법으로 재포장 시행

○ 공사비 증감 내용

[금액단위 : 천원]

NO.	구 분	당 초	변 경	증·△감	비 고
11.00	중앙버스전용차로	-	28,847	28,847
11.10	토공	-	13,976	13,976
	아스팔트 노면절삭	-	13,976	13,976
11.30	포장공	-	8,949	8,949
	개질아스콘포설및다짐-야간	-	2,851	2,851
	기층포설 및 다짐-야간	-	6,098	6,098
11.40	교통안전시설	-	5,922	5,922
	노면표시	-	5,922	5,922
■	직접공사비	-	28,847	28,847
	간접공사비	-	9,827	9,827
■	도 급 액	-	38,674	38,674
	관급자재비	-	88,809	88,809
	폐기물 처리비	-	24,256	24,256
■	총 공 사 비	-	151,739	151,739

Ⅳ		조치계획

○ 상기 내용을 검토한 결과, 중앙버스전용차로 설치공사 관련 포장 시공에 대하여 전문가 및 관계자 자문회의 결과에 따라 표층구간만 절삭 후 덧씌우기를 실시 하였으나,

○ 금년(2018년 07~08월) 혹서기에 폭염이 지속됨에 따라 아스콘의 소성변형이 발생하여 민원 및 안전사고 예방을 위하여 조속히 보수가 필요함.

- 기층 치환후 재포장구간은 소성변형 발생이 없음

○ 특히, 소성변형이 발생된 구간은 교차로 및 횡단보도 주변 등으로 대형 버스의 정차, 발차가 잦아 기층부까지 치환후 재포장함이 타당한 바, 시민의 안전 및 운전자의 안전 확보를 위하여 책임감리단 보고 내용과 같이 긴급 보수토록 조치하고,

○ 소요되는 비용{증 151,739천원(도급 38,674, 폐기물 24,256, 관급 88,809)}에 대하여는 추후 예산확보 범위내에서 설계변경시 반영코자 함.

붙 임 : 건설사업관리단 검토 의견서 1부.  끝.