투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재(냉난방기 외4) 납품기한 연기의뢰(시립노원청소년직업체험센터 신축 기계공사)

1. 도시기반시설본부 설비부-14889(2018.11.01.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 추진중인 □시립노원청소년직업체험센터 신축기계공사□에 소요되는 관급자재(냉난방기 외 4)의 납품기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 시립노원청소년직업체험센터 신축 기계공사

나. 납품기한 연기요청 내역

품 명	계약번호	계약업체	계약금액	납품기한		비고
				당 초	변 경
냉난방기구매 (EHP)	00168160107	㈜LG전자	**********	2018.12.20.	2019.03.15.	계약금액 변경없음
냉난방기실외기구매 (GHP)	00178156501	㈜LG전자	**********	2018.12.20.	2019.03.15.	계약금액 변경없음
냉난방기실내기구매 (GHP)	00168160107	㈜LG전자	*********	2018.12.20.	2019.03.15.	계약금액 변경없음
공기순환기	00167048002	은성화학	**********	2018.11.08.	2019.03.15.	계약금액 변경없음
자동제어구매 (1차)	12172189200	㈜삼원씨앤지	***********	2018.12.20.	2019.03.15.	계약금액 변경없음

※ 계약금액 및 수량 변경없음

다. 연기사유 : 선행 공정 일정상 관급자재 설치 시기 미도래

라. 귀책소재 : 서울시 도시기반시설본부

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙 임 : 1. 납품기한 연기검토 보고서 1부.

2. 합의각서 각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	윤대영		시책사업과장	代박경철		설비부장	11/02 권오식
협조자	경리과장	이현숙
시행	설비부-14975	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8651	/전송	02-3708-8659	/		/	부분공개(6)