문서번호	설비부-14976
결재일자	2018.11.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
곽용길		여인웅	11/02 권오식
협조

『서울 기록원 건립 전기공사』

물가변동(ESC, 4회)에 따른 계약금액 조정 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『서울 기록원 건립 전기공사』

물가변동(ESC, 4회)에 따른 계약금액 조정 검토보고

우리 본부에서 시행중인 『서울 기록원 건립 전기공사』 감리단으로부터 물가변동(ESC, 4회)에 따른 계약금액 조정 대한 실정보고가 있어 이를 검토하고 보고 드림.

공사개요

◯ 건    명 : 서울 기록원 건립 전기공사

◯ 규    모 : 수배전반 공사, 전등·전열 공사, 태양광 설비공사 등

◯ 공사기간 : 2016.04.20.~2018.12.15.(2차, ~2018.12.15)

◯ 공 사 비 : 금*************원(2차 *************원)

◯ 사 업 자 : 한빛시스템㈜ 대표이사 ***

◯ 감 리 사 : ㈜선진엔지니어링

관련근거

○ 서울기록원 제2018-356호(2018.10.30.) 서울기록원 건립 공사(전기) 물가변동으로 인한 계약금액의 조정(제4회) 검토보고.

보고 내용

○ 물가변동에 따른 계약금액(4회) 조정

구 분	기 준	기 시행			금 차	비고
		1 회	2 회	3 회	4 회
전 체		*************	*************	*************	*************
물가변동기준시점	최초-계약일	2016.04.11	2016.10.31	2017.01.31	2018.01.01
물가변동비교시점		2016.10.31	2017.1.31	2018.01.01	2018.09.01
기간 경과	계약일로부터 90일경과	202	91	334	242
물가변동조정율	3% 이상	3.19%	3.48%	4.51%	3.65%
공정률	공정	7.33%	14.40%	14.40%	67.34%	예정공정 적용
ESC 조정금액		**********	**********	***********	**********

※ 총공사기간이 2018년10월17일에서 2018년12월15일로 변경됨.

○ 공사계약일반조건 제22조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)에 의거 90일 기간경과 및 물가변동조정율이 3%이상 되고 계약금액의 조정 요청이 있어 물가변동으로 인한 계약금액의 조정 요건을 충족함.

공사비 조정 금액

(단위:원)

구 분	계약금액	조정금액	증‧감(ESC 분)	비 고
총 차	*************	*************	***********	4회

감리 검토의견

○ 물가변동 적용제외 대상금액 산출 시 기준공정률은 공사예정공정표상의 공정율과 서울시 정보관리시스템(ONNE-PMIS)에 보고된 실행공정률 중 앞선 공정률인 공사예정공정표상의 공정률을 적용하였음.

○ 상기와 같이 총 공사비 ************** 중 적용대상금액인 ************에 대하여 지수조정률(3.65%)을 적용한 조정금액 ***********을 물가변동조정 적용금액으로 반영함이 타당한 것으로 판단됨.

조치의견

○ 위 계약금액 조정(ESC, 4회) 요청 대하여 검토한 결과 관련규정 및 감리단 검토 의견이 적정한 것으로 판단되어 승인하고자 하며,

○ 총무부에 물가변동(ESC, 4회)에 의한 계약금액 조정변경 요청하고자 함.

따로붙임 :  공문사본 1부.  끝.