투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전[사업 준공연기 결정에 따른 토목공사 준공연기 검토요청(노들섬특화공간조성)]

1. 업무지시현장 : 노들섬 특화공간 조성 토목공사 신성종합건설주식회사, 노들섬 특화공간 조성 토목공사 주식회사 아이티엠코퍼레이션건축사사무소, 노들섬 특화공간 조성 토목공사 주식회사 유탑엔지니어링건축사사무소

2. 작 성 일 자 : 2018-11-05 17:11:29

3. 지 시 내 용

가. 서울시 공공재생과-10602호(2018.11.5.)와 관련입니다.

나. 서울시(공공재생과)에서 노들섬특화공간 조성공사 기간을 연장하는 것으로 결정하여, 본 공사기한에 대해서도 설계변경시 총 공사기간의 연장을 검토하여 제출하시기 바랍니다. 아울러, 기 제출된 2019년 예산안에 대해서도 추가 검토하여 제출하시기 바랍니다.

1) 준공기한 변경

- 2017. 11. 13.∼2019. 4. 27.→ 2017. 11. 13.∼2019. 8. 31.

(서측부분은 2019.5.31.일까지 완료하여 개관하므로 공사일정에 참고)

붙임 : 1. 관련공문 및 보고서 각 1부.

2. 조사표 1부.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							남덕희			도시고속도로과장					11/05 명경출
협조자
시행			토목부-18746									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-8666						/전송			02-3708-2599					/	heedeok@seoul.go.kr												/	부분공개(5)