문서번호	조경과-6167
결재일자	2018.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	조경과장
함도경		김효준	11/05 강인호
협 조

식물원 사막관 재조성공사를 위한

식물원 임시폐쇄 계획

2018. 11.

조 경 과

식물원 사막관 재조성공사를 위한

식물원 임시폐쇄 계획

「식물원 사막관 재조성 공사」를 진행함에 있어 방문객 안전을 위해 전시온실 및 표본전시관의 임시폐쇄가 필요하여 아래와 같이 보고 드림.
		ㅊ
	ㅊ

1		추 진 개 요

○ 임시폐쇄장소 : 전시온실, 식물표본전시관

○ 폐쇄사유 :

- 선인장 이식공정시 동절기여서 외부반출이 어려우므로 임시보관 할 전시온실(열대관,온대관)공간이 모두 필요

- 공사차량진입시 식물원 주출입구 주변의 수목 훼손우려가 있어 부출입구로 진입할 시 방문객의 안전위험이 노출됨.

○ 임시폐쇄기간 : 11. 08 ~ 12. 08(31일간)

구분 / 일시	11월															12월
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	1	3	5	7	9	11	13	14
설계서 검토 및 자재준비
선인장 제거 및 이식
토양 교체작업
선인장 식재
진입로 철거 및 기타철거														기초
벽체 페인트칠 외 잡작업
데크 및 보도포장																기초
시설물 설치

※ 공사기간(2018. 10. 31. ~ 12. 14.)

2		행 정 사 항

○ 관련부서(전략기획실 홍보팀, 고객도움터 등)에 임시폐쇄 계획 사전통보.

붙임 : 위치도 1부.  끝.