투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(2018년 목동운동장 녹지대 정비공사)

1. 목동사업과-9704(2018.11.05.)호와 관련입니다.

2.『2018년 목동운동장 녹지대 정비공사』에 대하여 아래와 같이 설계 변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2018년 목동운동장 녹지대 정비공사

나. 도 급 자 : 에스빠스조경(주) 대표 정미숙

다. 계약금액 : 금67,795,000원

라. 공사기간 : 2018.10.15.~11.08.

마. 공사내용 : 녹지대 정비 922.4㎡

바. 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 노후체육시설개보수사업, 목동운동장 · 신월야구공원 시설개 · 보수, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

사. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증(▲)․감(▼)	비고
총공사비		**********	**********	***********	현장여건에 따른 물량증감 및 보험료 정산
도급비	공급가액	**********	**********	***********
	부가가치세	*********	*********	***********
	계	**********	**********	***********
관급자재		**********	**********	*
계약기간		2018.10.15.~11.08.(변동없음)

붙임 : 1. 공사실정 및 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경내역서 및 변경도면 각 1부.

3. 제비율 검증 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

주무관	김은영		주무관	이경수		목동사업과장	전결 11/05 이정권
협조자	주무관	이동열		★주무관	조성익
시행	목동사업과-9712	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5,7)