문서번호	교량안전과-19272
결재일자	2018.11.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
백운경		代백운경	11/05 김종호
협조	강북일반교량팀장		손창익
	특수교량팀장		정준용

"2018년 한강교량일상유지보수공사(연간단가)-2공구" 설계변경 자문회의 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

교량안전과

- 2018년 한강교량일상유지보수공사(연간단가)-2공구 -

설계변경 자문회의 계획

본 공사와 관련 설계변경에 대한 설계사유의 타당성, 신규공종 및 물량변경의 적정성 등을 검토하기 위한 설계변경 자문회의를 아래와 같이 개최코자 함.

관련 근거

○“설계변경 자문회의” 운영계획(교량안전과-17844호(2018.10.12.)

○ 감리단 설계변경 자문회의 자료 제출(동성한강 2018-669호)

공사 개요

○ 공 사 명 : 2018년 한강교량일상유지보수공사(연간단가)-2공구

○ 공사기간 : 2018. 01. 04 ~ 2018. 12. 31

○ 공사규모 : 아스팔트균열보수100m, 신축이음보수61m, 균열보수 170m, 표면보수6,374㎡, 단면보수 140㎡, 강재도장 1,069㎡

○ 공 사 비 : 3,064,618천원

(도급 2,772,692천원, 관급 197,351천원, 이전 94,575천원)

○ 시공/감리 : 동보진흥건설(주)외1 / ㈜동성엔지니어링 외 2개사

설계변경자문회의 개요

○ 일  시 : 2018. 11. 5.(월) 17:00~

○ 장  소 : 교량안전과 회의실

○ 위원구성

- 위원장 : 참석위원 중에서 호선

- 위  원

· 내부(4) : ********************************

· 외부(1) : *************************

- 간  사 : *********

○ 자문사유

- 설계변경 1회당 순공사비 3,000만원 증액시

- 순공사비 기준 3,000만원 상당의 산출내역서에 없는 품목·비목 조정

○ 자문내용 : 설계(작업지시) 사유 및 물량변경의 적정성 등

주요 설계변경 사항

○ 설계변경 사유 : 작업지시 4차, 7차, 9~13차에 따른 수량증감 및 신규공종 반영

- 작업 지시 내역

작업지시	대상시설물	작업지시내용	비고
4차	원효대교	정밀점검용역 등에 따른 AL배관 설치 등
7차	양화대교	집중점검 등에 따른 신축이음부 누수차단장치 설치 등
9차	상산대교	집중점검 등에 따른 아스팔트포장, 아스팔트균열보수 등
10차	서강대교	집중점검 등에 따른 신축이음장치보수, 경계석~보도슬라브 이음부 방수 등
11차	한강대교	집중점검 등에 따른 신축이음장치보수, 조류방지망 설치 등
12차	동작대교	집중점검 등에 따른 신축이음장치보수, 콘크리트 균열보수 등
13차	가양대교	집중점검 등에 따른 교면포장, 배관보수 등

○ 주요 수량 변경내역

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증-감	비고
철거공	포장절단	m	365.6	463.2	97.6
교면보수공	아스팔트 균열보수	m	100.0	2,067.0	1,967.0
방수공	교면방수	㎡	1,011.0	20.0	-991.0
신축이음 보수	신축이음 보수	m	24.0	60.78	36.8
상판보수공	상판보수	㎡	5.0	42.67	37.7
콘크리트보수공	균열보수	m	169.5	177.2	7.7
강재보수	조류방지시설물 설치	㎡	1,678.0	3,832.1	2,154.1
도장보수공	강재도장	㎡	1,069.0	81.0	-988.0

○ 주요 신규공종 반영내역

작업지시	대상시설물	주요 신규공종	비 고
4차	원효대교	충격흡수시설(원효북단 D램프) 1개소
7차	양화대교	데크설치 184.4㎡
10차	서강대교	경계석~보도슬라브 이음부 방수 560m
11차	한강대교	보도부 차수조인트 설치 670m
12차	동작대교	메쉬휀스 설치 39경간
13차	가양대교	충격흡수시설(가양북단램프) 1개소

○ 공사비 변경 현황                                 (단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증,감	비 고
총공사비	3,064,618	3,064,618	0
도급비	2,772,692	3,045,618	272,926
관급자재비	197,351	11,000	-186,351
이전비(폐기물처리비)	94,575	8,000	-86,575

행정사항

○ 자문결과에 따라 설계변경 시행 후 준공 처리

붙임 1. 설계변경 자문회의 개최 사유서 1부.

2. 설계변경 요약서 1부.

3. 내역서(신규,초과분) 1부. (용량 초과로 별첨)

4. 공종별 수량산출서 1부.

5. 설계변경 자문회의 사전 체크리스트 1부.

6. 계약금액 조정 검증 확인서 1부. 끝.