투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	스페이스 살림 조성공사 책임건설사업관리자 김일영 귀하
(경유)
제목	실정보고 승인 통보(스페이스 살림 조성공사)

1. HTSC 1810-51(2018.10.30.)호와 관련입니다.

2.『스페이스 살림 조성공사』와 관련하여 제출한 “지하층 집수정 재질 및 수량 변경 실정보고”에 대하여 승인하오니 공정관리 및 안전·품질관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

□ 변경내역

구 분	변경 내용	증감 금액(원)		비 고
지하층 집수정 재질 및 수량 변경	· 집수정 재질 변경 철근콘크리트조(현장타설)⇒강재 집수정(기성품) · 집수정 수량 변경 당초 16개소⇒변경 17개소	도급공사비	*************
		관급자재비	*************
		계	*************

※ 건설사업관리단 검토의견 : 시공자 설계변경 요청사항으로, 도급공사비의 증감없이 품질향상, 공기단축, 사업비 절감을 위해 적정함.

3. 아울러, 계약금액 결정은 시장가격 조사 및 낙찰율 적용 등 관련절차에 따라 조정될 수 있음을 알려드립니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	남광연		건축관리과장	차무흥		건축부장	11/05 임인구
협조자
시행	건축부-15634	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/	kynam01@seoul.go.kr	/	부분공개(5)