문서번호	조경과-14442
결재일자	2018.11.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설팀장	조경과장
김현이		석승우	11/05 문길동
협 조

- 옥상녹화 연계 태양광 설치사업 -

사업취소 및 대상지 변경 검토보고

2018. 11.

푸른도시국

(조 경 과)

- 옥상녹화 연계 태양광 설치사업 -

사업취소 및 대상지 변경 검토보고

2018 옥상녹화 연계 태양광 설치사업 추진 관련, 경제성 부족 및 음영 문제로 정상적인 사업추진이 어려운 2개소 대상지에 대해 아래와 같이 대상지를 변경하여 추진코자 검토·보고드림 [동부공원녹지사업소 시설과-2644(2018.10.19.)호 및 금천구 공원녹지과-14233 (2018.10.29.)호 관련]

1		2018년 사업 개요

○	대 상 지 : 서울고등법원 등 6개소

○	설치용량 : 40kW

○	사업기간 : 2018. 1. ~ 12.

○	사업내용 : 태양광 발전설비 설치 등

※ 공사중(2개소), 설계중(2개소), 사업취소 및 불가(2개소)

○	사 업 비 : 250백만원(시설비 237,500천원, 감리비 12,500천원)

2		대상지 변경 검토 결과 : 대상지 변경 적정

○	대상지 변경 검토

대 상 지		변경사유	검토결과	시행기관
당 초	변 경
서울고등법원 서관 (신규 옥상녹화지)	관악소방서 복지동 (신규 옥상녹화지)	경제성, 건물미관, 안전문제, 유지관리 등 법원 자체 검토결과 사업성 부족으로 사업취소 요청	적정	관악구
모아래어린이집 (기 옥상녹화지)	금천구청사 (기 옥상녹화지)	음영 분석결과 사업성이 떨어져 사업불가 판정	적정	금천구

○	위치도 및 현황사진(변경 대상지)

관악소방서 복지동(관악구 관악로 97)	현황사진

금천구청사(금천구 시흥동 2010)	현황사진

3		향후 계획

○ 2018. 11.: 설계심의 및 계약심사, 조달구매

○ 2018. 12.: 태양광 설치(조달구매·설치) 및 정산

4		행정 사항

○ 조속히 사업이 추진될 수 있도록 관련 예산 신속 재배정 및 설계       심의 등 사전절차 신속 추진

○ 연내 공사 준공될 수 있도록 시행기관(관악구 및 금천구)와 긴밀히 협조

붙임 : 관련 공문 각 1부.  끝.