내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	한강교량 보수보강공사 건설사업관리용역 사업책임기술자
(경유)
제목	설계변경에 따른 단가적용 협의결과 알림

1. 동성한강 2018-415호(2018.11.02.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 귀 건설사업관리단의『한강상 PSC교량 안전강화공사(원효대교)』의 설계변경에 따른 단가적용 협의 건에 대하여 검토한 결과 계약상대자[에스디그룹(주)]가 제시한 단가적용 기준에 대하여 타당하다고 판단되어 협의가 이루어 짐을 알려드리오니 설계변경시 협의한 단가(설계변경당시 산출한 단가에 낙찰율 적용)를 적용하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	우창원		특수교량팀장	정준용		교량안전과장	11/05 김종호
협조자
시행	교량안전과-19238	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-1952	/전송	02-2133-1429	/	wcw1000@seoul.go.kr	/	대시민공개